문서번호	건축부-3559
결재일자	2020.2.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		의료시설과장	건축부장
김재호		신추교	02/26 임인구
협 조
	주무관			김성권

『시립마포 실버케어센터 건립공사』

실정보고에 대한 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 2.

도시기반시설본부

(건축부)

『시립마포 실버케어센터 건립공사』

실정보고에 대한 검토보고

『시립마포 실버케어센터 건립공사』 영구배수 관련 실정보고 검토보고가 건설사업관리단으로부터 제출되어 검토보고 드림.

1		사업개요

위    치 : 서울특별시 마포구 백범로 21 (舊, 한국산업인력관리공단 )

규    모 : 지하2층/지상4층, 연면적 12,271㎡

(서을창업허브단지 조경공사 포함)

용    도 : 노유자시설(노인복지시설)

공사기간 : (1차)‘19.04.15. ~ ’20.04.13. (총차:‘19.04.15. ~ ’21.12.14.)

공 사 비: (1차)금3,650,000,000원 (총차:금14,973,725,500원)

시 공 사 : 혁성공영㈜ (대표:이기열), ㈜태왕이앤씨(대표:노기원)

감 리 사: ㈜유탑엔지니어링건축사사무소(대표:박재형), ㈜아이티엠코퍼레이션건축사사무소(대표:이길동)

2		추 진 경 위

‘19. 04. 05.  : 공사계약 체결

‘19. 04. 15.  : 공사착공

‘19. 05. 24.  : 착수회의(kick-off meeting) 개최

‘19. 08. 06.  : 서울창업허브단지 시험동 철거 완료

‘19. 10. 13.  : 우오수 관로 및 지장물 이설공사 완료

‘20. 02. 현재  : 흙막이 가시설 설치 및 터파기(풍화암) 등

3		실정보고 내용

관련근거

○ 영구배수공법 내역반영 실정보고 검토보고 [유탑(마실) 제20-9호, 2020.2.6.]

○ 영구배수공법 내역반영 실정보고 검토보고 보완요청 (건축부2543, ’20.2.12.)

○ 영구배수공법 보완 검토보고 [유탑(마실) 제20-14호, 2020.2.20.]

실정보고 사유

○ 영구배수공법(특허공법)이 도면에 표기되어 있으나 내역에 미반영됨

실정보고 내용

구 분	당 초	변 경	사 유	비 고
	도 면	도 면
	내 역 서	내 역 서
****	******* ************************** ******	***** ******	****************************
	**** *********	**** ********

※ “서울특별시특정기술선정심사위원회구성및운영에관한조례” 에 의한 심사대상 아님

4		감리자 검토의견

************************************************************************************************************************************************************************************************************************* ************

5		처리의견

****************************

붙 임 : 1. 영구배수공법 내역반영 실정보고 검토보고 1부

2. 영구배수공법 보완 검토보고 1부.  끝.