문서번호	시설관리과-3769
결재일자	2020.2.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장		강서수도사업소장
하석주	정진호	변재홍		02/26 정진일
협 조

『2020년 아리수올림터‧배수지 노후시설 개량』

중앙제어실 네트워크장비 교체계획

2020. 2.

강서수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『 2020년 아리수올림터‧배수지 노후시설 개량 』

중앙제어실 네트워크장비 교체계획

우리사업소 중앙제어실 기존 네트워크 장비의 단종으로 긴급상황(기기고장, 선로사고 등)발생시 복구 지연 등이 발생할 우려가 있으므로, 부품의 원활한 수급 등 신속조치가 가능한 대체품으로 교체하여 기전설비 유지관리에 만전을 기하고자 함.

※네트워크장비(ETOS-300X Series, ETOS-500XP Series 등)

- 아리수올림터․배수지의 현장데이터(배수지 수위, 기전설비 운전상태 등)를 취합하여 감시 및 제어하는 설비(상수도사업본부 연동)

Ⅰ	추진근거

○ 본부 시설관리과-6454호(2019.06.26.)

- 네트워크장비 ETOS-X Series 단종 및 대체 모델 안내 통보

(단종제품 : ETOS-300X Series, 대체제품 : ETOS-500XP Series)

Ⅱ	현 황

○ 시설 현황

사업대상	해당설비	규 격	수 량	단종시기	비 고
중앙제어실 (강서수도사업소 5층)	네트워크장비	ETOS-300X Series	4대	2017.12.31.	※ 해당제품 A/S용 부품 2020년 12월까지만 공급가능

○ 시설물 사진

구 분	네트워크 장비 사진	교체대상(단종제품)
중앙제어실

Ⅲ	사업개요

○ 사 업 명 : 중앙제어실 네트워크장비 구매설치

○ 사업기간 : ‘20. 2. ~ 6.

○ 총사업비 : 금69,300천원

- 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, 시설비및부대비, 시설비

(중앙제어실 네트워크 장비 교체)

○ 대상시설

사업대상	해당설비	규 격	수 량	단종시기	비 고
중앙제어실 (강서수도사업소 5층)	네트워크장비	ETOS-300X Series	4대	2017.12.31.	※ 해당제품 A/S용 부품 2020년 12월까지만 공급가능

○ 계약방법 : 지명경쟁입찰

	<참고> 지 명 입 찰
∎ 지명입찰 법령 - 『중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률』제7조(경쟁제품의 계약방법) - 『지방계약법』시행령 제22조(지명입찰에 의한 계약) 제2호, 제12호 ∎ 지명입찰 사유 - 중앙제어실 네트워크 장비는 아리수올림터‧배수지의 현장데이터(수위, 기전설비 운전상태 등)를 취합하여 감시 및 제어하는 중요 설비로써 고장시 안정적인 급수운영의 어려움을 감안, 제작기술이 우수하고 납품의 신속성 및 수리 능력을 인증할 수 있는 전문업체 선정 필수 ∎ 지방계약법 시행령 제23조(지명입찰대상자의 지명) - 5인이상의 입찰대상자를 지명하여 2인 이상의 입찰참가신청을 받아야 한다. ∎ 지명입찰대상자 추천의뢰 - 한국계량계측기기 공업협동조합에 우수업체 최소 5개사 이상 추천 의뢰 (자격조건) 중소기업자간 경쟁물품에 대한 직접생산증명서(프로세스제어장치) 및 소프트웨어 사업자확인서를 소지한 업체로 사업장이 서울, 인천 및 경기지역에 소재한 중소기업

Ⅳ	사업내용

번호	품 명	규 격	단위	수량	설치장소	비고
1	중앙제어실 S/W 설치	POS & 프로토콜변환기 APPLICATION	식	1	제어실	-
2	감시제어반 제작	Device CPU, 전원모듈, 포트카드, Device Base	식	4
3	ETOS-300X Series (기존제품)	EtherFos 300	식	1	-	철 거

Ⅳ	추진일정

○ 본청 계약 심사 의뢰                                    : ‘20. 2월

○ 우수업체 추천 의뢰(한국계량계측기기공업협동조합)       : ‘20. 3월

○ 시행문 및 물품구매 사전공개 요청(행정지원과)           ; ‘20. 3월

○ 물품 계약 의뢰(행정지원과)                             : ‘20. 4월

○ 물품 계약 체결 및 제작도서 승인                        : ‘20. 4월

○ 물품 제작구매 설치 완료 및 시운전                      : ‘20. 6월

○ 물품 검사(수)조서                                      : ‘20. 6월

Ⅴ	기대효과

○ 단종된 ETOS-X Series 제품을 신속히 교체함으로써 안정적인 통합감시제어시스템 운영

○ 원활한 부품수급을 통한 시설물 안전사고 예방 및 신속한 유지관리 등

Ⅵ	행정사항

○ 지명입찰을 위한 한국계량계측기기공업협동조합 우수업체 추천 의뢰

○ 안전적인 통합감시제어시스템 설치 및 운영과 유지관리(시설관리과)

붙 임 : 1. 내역서 1부

2. 물품규격서 1부.  끝.