문서번호	설비부-2875
결재일자	2020.2.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	시책사업과장	설비부장
김수진	이종근	02/26 임정규

『동부간선도로 확장(3공구) 통신공사』

관급자재 납품기한 연기 검토보고

2020. 2.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『동부간선도로 확장(3공구) 통신공사』

관급자재 납품기한 연기 검토보고

『동부간선도로 확장(3공구) 통신공사』공기연장와 관련 관급자재 설치시기 미도래로 인한 납품기한 연기에 대하여 검토하고 보고 드림

1		공사현황

❍ 사 업 명: 동부간선도로 확장(3공구) 통신공사

❍ 공사위치: 상계주공16단지 ~ 의정부시계

❍ 공사기간: 2017.04.26. ~ 2020.05.31.

❍ 도 급 비: 1,237백만원

❍ 감 리 단: 동부엔지니어링주식회사

2		검토내용

관련근거

❍ 영상감시장치 납품기한 연기요청(동삼감 제2020-48호, 2020.02.21)

검토내용

❍ 납품기한 연기 사유

- 통신공사의 준공기한 연기(`19.12.31.→`20.05.31.)에 의해 영상감시장치의 현장설치 및 시운전 등의 일정이 미도래하여 선행공종에 맞추어 공사가 원활하게 이루어지도록 납품기한을 연기하고자 함

❍ 납품기한 연기내용

품 명	계약번호 (구매관리번호)	계약자	계약금액 (단위: 천원)	납품기한
				변경전	변경후
영상감시장치	12192195800 (12192205200)	이노뎁(주)	50,686	`20.03.31.	`20.05.31.

3		검토의견

❍ 건설사업관리기술자 의견

- 전기 수전 및 통신공사 배관, 배선공사와 영상감시장치의 현장설치 일정이 상이하여 과업수행에 차질이 발생하므로 선행공정과 같이 준공될 수 있도록 납품기한을 연기하는 것이 타당하다고 판단됨

❍ 검토결과 조치의견

- 건설사업관리기술단이 제출한 영상감시장치 납품기한 연기에 대한 검토내용이 적정한 것으로 판단되어, 납품기한 연기 조치하여 공사추진에 만전을 기하고자 함

붙 임: 건설사업관리단 공문 1부.  끝.