문서번호	설비부-2793
결재일자	2020.2.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	건축설비과장	설비부장
마권택	김은덕	02/26 임정규

「서울의료원 권역응급의료센터 증축 기계설비공사」

관급자재(팬코일유닛) 구매계약 취소 검토 보고

2020. 2.

도시기반시설본부

(설 비 부)

「서울의료원 권역응급의료센터 증축 기계설비공사」

관급자재(팬코일유닛) 구매계약 취소 검토 보고

건설사업관리단으로부터 관급자재(팬코일유닛) 구매계약 취소 요청이 있어 관련 내용 등을 검토한 결과, 금번 구매계약을 취소하고 향후 재구매하는 것이 타당한 것으로 판단되어 검토 보고드림

1		공사개요

○ 공 사 명 : 서울의료원 권역응급의료센터 증축 기계설비공사

○ 위    치 : 서울시 중랑구 신내로 156(신내동 316)

○ 규    모 : 지상3층, 연면적 3669.62㎡, 의료시설(종합병원)

○ 기    간 : ´19.04.08.~´20.10.07.(1차 ´20.08.31.)

○ 공 사 비 : 3,037백만원(1차 800백만원)

○ 도 급 사 : 덕신건업㈜ 외 3개사

○ 감 리 사 : ㈜종합건축사사무소 동일건축 외 1개사

2		관련근거

○ 서울의료원 권역응급의료센터 기계설비공사 팬코일유닛 계약 취소 요청

− 동일감리 제20-056호(2020.02.24.)

3		구매현황

○ 건    명 : 서울의료원 권역응급의료센터 증축 기계설비공사_팬코일유닛 구매

품명	납품요구번호	계약자	금액(원)	납품기한
*****	****************	*******	**********	***********

4		검토내용

○ 건설사업관리단 검토내용

− 현재 건축공정이 증축관련 설계변경으로 공사가 일시 중지됨에 따라 납기 내에 납품이 불가하여 납기 연장이 필요하나

− 조달청과 업체의 MAS 계약기간 만료로 납기 연장이 불가하여 계약취소하고자 함

○ 관련규정 검토

− 조달청 물품 다수공급자계약 특수조건(조달청 공고 2019-17호, 2019.1.30.) 제26조 제4항에 따라 수요기관의 불가피한 사정으로 납품기한을 연기할 필요가 있는 경우 계약상대자와 협의하여 해당 납품요구를 취소할 수 있음

5		조치계획

○ 계약부서에 관급자재(팬코일유닛) 구매계약 취소를 의뢰하고 향후 공정진행 상황에 따라 재구매하고자 함

붙임  건설사업관리단 팬코일유닛 계약 취소 요청 공문(합의각서 포함) 1부