문서번호	정수시설과-1658
결재일자	2020.2.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
김세환		김석정	02/26 김중영
협 조
	주무관			이형문

2020년도 뚝도아리수정수센터

전기설비 유지보수 장기계속계약 추진 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 2.

2020년도 뚝도아리수정수센터

전기설비 유지보수 장기계속계약 추진 계획

우리 정수센터 전기설비 유지보수를 위한 연간단가공사를 장기계속계약으로 추진하여 업무공백 최소 등 효율을 제고하고 정수시설 운영 및 설비 유지관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		관련근거

□ 청렴도 향상을 위한 정수센터 기전설비 유지보수 연간단가 시행계획

○ 기전설비과-797(2013.2.20.)호

□ 2020년도 기전설비 유지보수 품셈단가 배포

○ 기전설비과-1974(2020.2.21.)호

Ⅱ		추진배경

□ 기전설비 유지보수 업무처리시 수의계약을 지양하여 청렴도 향상 및 행정 투명성 제고

□ 본부의 통일된 설계기준(적용 대가 및 단가)에 따라 연간단가계약을 체결하여 단순 반복적 계약업무 축소에 따른 업무 효율성 증대

□ 전문 공사업체와의 계약 체결로 노후 시설의 적기 정비 및 고장 발생시 긴급 복구 체계 유지

Ⅲ		추진개요

□ 추진기간: 2020. 4. ~ 2021. 3.

□ 적용대상: 취․정수장 전기시설물

□ 추진방법: 추진계획 및 본부 설계지침에 따라 시행

Ⅳ		사업내용

□ 특고 및 고압전기설비

○ 정수장 및 취수장 노후 전기설비 개선

□ 저압 전기설비

○ 실내 및 옥외 조명설비, 전기방식설비, MCC반, 분전반, 전선로, 전동기 등        정수시설 운용 및 관리를 위한 보수

□ 전기안전진단 결과에 따른 문제점에 대해 보수 또는 개량 조치

□ 전기시설 고장 발생시 긴급 보수

□ 기타 노후 전기설비 보수(정비)

※ 세부 사업 추진 시 각 사업별로 별도 보고 예정

Ⅴ		발주방법

□ 소요예산: 86,548천원

□ 예산과목

○ 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비(수선유지비)

○ 상수도사업비용, 영업비용, 원수및취수비, 수선유지교체비(수선유지비)

□ 계약방법: 일반공개경쟁입찰

○ 입찰참가자격: 전기공사업법에 의한 전기공사업 등록업체로서 주된 영업소의 소재지가 서울특별시에 있는 자

○ 공사기간: 착공일로부터 2021. 3. 31.까지(장기계속단가계약)

Ⅵ		세부일정

□ 2020.  2. ~  3.  설계서 작성(계약심사) 및 공사 발주

□ 2020.  3. ~  4.  계약 및 착공

□ 2020.  4. ~ 12.  1차수 시행 및 기성

□ 2021.  1. ~  3.  2차수 시행 및 준공

※ 공사는 작업지시서에 의하며, 계약상대자의 기성 청구시 작업완료 보고서에 의하여 정산 및 기성금 지급

Ⅶ		행정사항

□ 발주전 계약심사 : 안전총괄과

□ 집행실적 보고 : 기전설비과

○ 일정: 매 분기 익월 10일까지

○ 내용: 장기계속 및 유지보수 계약 현황, 기성, 계약 변경 사항 등

붙임  1. 공사설명서 1부

2. 원가계산서 1부.  끝.