문서번호	시설과-639
결재일자	2020.2.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설과장	동부공원녹지사업소장
강희진	조민형	박종수	02/27 최현실
협 조
	재무팀장		곽선아

「서울숲 와이파이 설치」

준공기한 연기 검토 보고

2020. 02.

동부공원녹지사업소

(시설과)

「서울숲 와이파이 설치」

준공기한 연기 검토 보고

추진중인「서울숲 와이파이 설치」관련, 준공기한 연기사항이 발생하여 아래와 같이 검토하고 보고 드림

□ 공사개요

❍ 공 사 명 : 서울숲 와이파이 설치

❍ 위    치 : 서울시 성동구 뚝섬로 273

❍ 규    모 : AP 14개, 광케이블 2418m

❍ 계 약 자 : *************

❍ 계약금액 : *************************************

❍ 공사기간 : ****************************

□ 검토내용

❍ 연기사유

- 향후 유지관리 편의를 위하여 특성이 다른 와이파이와 CCTV선

로 공유구간을 최소화 하고, 가능한 구간은 CCTV와 와이파이

선로를 분리하기 위한 190m 지중 매입 광케이블선로 시공을

위한 공사기간 절대 부족하여 공기 연장코자함.

❍ 준공기한 변경

- 당초 : 2020.2.28

- 변경 : 2020.3.17

❍ 지체상금 부과 검토

- 연기사유 귀책소재 : 동부공원녹지사업소

- 지체상금 부과여부 : 미부과

□ 행정사항

❍ 계약부서에 준공기한 연기 변경 계약 요청