문서번호	기전설비과-2253
결재일자	2020.2.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		기전설비과장	생산부장
이래운		조성태	02/27 서대훈
협 조
	주무관			김형식
	주무관			김인준

□아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!□

『우면산가압장 급수체계 개선공사』

건설사업관리기술자 투입기간 변경검토

2020. 2.

상수도사업본부

[생산부]

「우면산가압장 급수체계 개선공사」

건설사업관리기술자 투입기간 변경검토

「우면산가압장 급수체계 개선공사」추진 중 기전분야 건설사업관리기술자 투입기간 변경과 관련 감리단에서 제출한 실정보고를 검토 후 그 결과를 보고 드림,

□ 용역개요

○ 용역명 : 우면산가압장 급수체계 개선공사 감독권한대행등 건설사업관리용역

○ 계약자 : ㈜도화엔지니어링, ㈜대한콘설탄트

○ 계약금액 : 164,748천원(4차분 259,721천원)

○ 용역기간 : 2017. 12. 18.~2020. 7. 4.

□ 변경개요

○ 투입계획 변경 : 기전분야 건설사업관리기술자 각 1개월 조정

구 분	분 야	투입기간	투입개월	비 고
당 초	기계분야	‘20. 1. 1. ~ ’20. 4. 30.	4월
	전기분야	‘20. 1. 1. ~ ’20. 4. 30.	4월
변 경	기계분야	‘20. 1. 1. ~ ’20. 2. 29. ‘20. 4. 1. ~ ’20. 5. 31.	4월	3월 철수
	전기분야	‘20. 1. 1. ~ ’20. 3. 31. ‘20. 5. 1. ~ ’20. 5. 31.	4월	4월 철수

※ 투입개월 증․감 없이 투입기간 조정배치

○ 변경사유: 암사 저양정계통 송수펌프 교체공사 일시 중단으로 인한 투입기간 조정

- 관련근거 : 암사 저양정계통 송수펌프 1차 시운전 계획

(기전설비과-826호, 2020.1.22.)

□ 실정보고 검토결과

○ 감리단 검토의견 적정 여부 : 적정

- 잔여공정 등 현장 여건을 고려 효율적인 공사감독 업무수행을 위한  건설사업관리기술자 투입계획 변경은 적정함.

□ 조치계획

○ 효율적인 공사감독 업무수행을 위한 기전분야 건설사업관리기술자의 투입기간 변경이 적정하므로 감리단 실정보고를 승인하고자 함.

붙임  감리단 실정보고 1부.  끝.