투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신자	공원운영과장
(경유)
제 목	서울숲 와이파이 설치 준공기한 변경 의뢰

1. 시설과-639(2020.2.27.)호와 관련입니다.

2. 우리 사업소에서 추진중인 『서울숲 와이파이 설치』에 대하여 아래와 같이 준공기한 변경의뢰하오니 조치 바랍니다.

1) 공 사 명 : 서울숲 와이파이 설치

2) 도 급 액 : **************************

3) 도 급 자 : ***************

4) 공사내용 : AP 14개, 광케이블 2418m 설치

5) 변경내용

○ 공사기한 변경내용

- 공기 변경 : 2020. 2. 28. ⇒ 2020. 3. 17.

- 지체상금 부과 여부 : 미부과

- 연기사유 귀책소재 : 동부공원녹지사업소

6) 예산과목 : 동부공원녹지사업소시설과, 공원녹지정책개발및만족도개선, 공원이용서비스만족도향상, 공원유지관리및이용활성화, 우리동네시공원가꾸기(시민참여), 시설비및부대비, 시설비(예산편성부서 : 푸른도시국 공원녹지정책과)

붙   임 :  준공기한 연기 검토보고 1부.  끝.

	시설과장
주무관	강희진		시설관리팀장	조민형		시설과장	02/27 박종수
협조자
시행	시설과-644	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로20길 33 (신대방동)	/
전화	02-2181-1156	/전송	02-2181-1169	/	jhg815@seoul.go.kr	/	부분공개(5)