투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	하도급 계약 변경 알림(강남순환 4공구)

1. 서영강남 2020-31(2020. 2. 20.), 35(2020. 2. 26.) 관련입니다.

2. 우리 부에서 시행 중인『강남순환도시고속도로 4공구 건설공사』관련하여 하도급 계약 변경 통보되어 아래와 같이 알려드리오니 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.

□ 하도급 계약 변경 현황

하도급사	공 종	공 사 비				공사기간
		구분	원도급액	하도급액	비율 (%)
***** ******	방음터널 설치공사	변경	8,499,700,000	7,005,900,000	82.43	2017. 5. 26.~ 2020. 5. 31.
		변경	8,619,600,000	7,109,080,000	82.48	2017. 5. 26.~ 2020. 5. 31.
***** ******	도로표지판 설치공사	변경	2,041,600,000	1,768,800,000	86.64	2016. 4. 27.~ 2020. 5. 31.
		변경	2,169,640,000	1,868,350,000	86.11	2016. 4. 27.~ 2020. 5. 31.
******* *******	기계설비공사	변경	231,880,000	202,400,000	87.29	2019. 7. 8.~ 2020. 1. 31.
		변경	231,880,000	202,400,000	87.29	2019. 7. 8.~ 2020. 5. 31.

붙임  하도급 변경계약 통보서 3부.  끝.

	토목부장
주무관	김구		도시고속도로과장	장수철		토목부장	02/27 김용제
협조자
시행	토목부-4126	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-8664	/전송	02-3708-2599	/	neuf@seoul.go.kr	/	부분공개(6)