문서번호	시설보수과-808
결재일자	2020.2.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
김민호		임준빈	02/27 代김광석
협조

『소화조 및 저류조 퇴적물 제거 용역』

설계변경(2회) 시행보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 2.

중랑물재생센터

(시설보수과)

『소화조 및 저류조 퇴적물 제거 용역』

설계변경(2회) 시행보고

우리 센터에서 시행중인 “소화조 및 퇴적물 제거 용역”의 계약금액 조정 및 물량 증·감 사항이 있어 아래와 같이 설계변경 시행하고자 합니다.

Ⅰ		용역개요

○ 용 역 명 : 소화조 및 저류조 퇴적물 제거 용역

○ 용역기간 : 2019. 04. 01. ~ 2019. 5. 31.

○ 도 급 자 : *****************

○ 도 급 비 : ************

○ 용역개요 : 퇴적물 제거 9,394㎥

Ⅱ		보고내용

○ 설계변경사유 : 계약금액 조정 및 퇴적물 제거물량 증ㆍ감

○ 계약금액 조정 : 당초 31,030원 ⇒ 변경 : 29,962원

- 흡입차 준설 : 산출근거 노무품 조정에 따른 계약 금액 조정

• 건설기계운전사(187,069원) → 화물차 운전사(158,708원)

○ 퇴적물 제거 물량 증가 : 당초 9,394㎥ ⇒ 변경 9,729㎥

○ 주요 설계변경 내용

공 종	위 치	단 위	수 량
			당 초	변 경	증ㆍ감
제2처리장 소화조	5조	㎥	1,642	1,642	-
제3처리장 소화조	C 계열 2-1	㎥	1,885	1,885	-
제3처리장 소화조	A 계열1-1	㎥	2,025	2,360	증335
제2처리장 소화조	10조	㎥	2,057	2,057	-
농축 슬러지	B-2	㎥	1,205	1,205	-
농축 슬러지	C-1	㎥	580	580	-

○ 설계변경 금액

구 분		당초 계약금액	변경 계약금액	증ㆍ감	비 고
총공사비		***********	***********	-
도급비	공급가액	***********	***********	-
	부가가치세	**********	**********	-
	계	***********	***********	-

Ⅲ		조치계획

○ 상기 내용 등에 대하여 설계변경을 시행코자 합니다.

붙임 : 설계변경 관련서류 각 1부.  끝.