투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신자	공원운영과장
(경유)
제 목	준공기한 연기 의뢰(보라매공원 와우산 노후시설 정비사업 실시설계용역)

1. 시설과-632(2020.2.27)호의 관련입니다.

2. 우리사업소에서 추진 중인「보라매공원 와우산 노후시설 정비사업 실시설계 용역」에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 보라매공원 와우산 노후시설 정비사업 실시설계용역

나. 용역기간 : 2020. 01. 20 ~ 2020. 02. 28

다. 계약금액 : ************

라. 도 급 자 : ****************

마. 준공기한 연기

- 당 초 : 2020. 01. 20 ~ 2020. 02. 28

- 변 경 : 2020. 01. 20 ~ 2020. 03. 16 (17일 연장)

바. 지체상금 부과검토

- 지체상금 부과여부 : 미부과

붙  임 : 준공기한연기 검토보고서 1부.  끝.

	시설과장
주무관	황은애		공원조성팀장	하종식		시설과장	02/27 박종수
협조자	재무팀장	곽선아
시행	시설과-635	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3780-0838	/전송	02-3780-0745	/		/	부분공개(5)