코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	변경계약 의뢰(준공기한 연기)

우리과에서 시행 중인 아래 용역에 대하여 다음과 같이 준공기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 용 역 명 : 행당교 및 중랑천횡단 보행교 신설 타당성조사 용역

2. 계 약 자 : ㈜도화엔지니어링

3. 준공기한 연기계획

구 분	당 초	변 경	비 고
준공 기한	2020년 02월 28일	2020년 03월 31일

4. 귀책사유 : 서울특별시

5. 연기사유 : 관련부서 의견 수렴 및 협의 의견 반영 등을 위하여 과업기간 연장 필요

붙임 : 1. 준공기한 연기의뢰서 1부.

2. 준공기한 연기방침서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	도로계획과장
주무관	심유경		도로시설계획팀장	황원근		도로계획과장	02/27 안대희
협조자
시행	도로계획과-3074	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-2133-8082	/전송	02-2133-0763	/	iloveseoul60@seoul.go.kr	/	부분공개(6)