문서번호	설비부-2960
결재일자	2020.2.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시책사업과장	설비부장
임원성		이종근	02/28 임정규
협조

「동부간선도로확장(2공구) 전기공사」

설계변경(표시등 배관) 검토 보고

2020. 2.

도시기반시설본부

(설 비 부)

「동부간선도로확장(2공구) 전기공사」

설계변경(표시등 배관) 검토 보고

동부간선도로확장 2공구 책임건설사업관리단이 제출한 거리유도표시등 및 시선유도등 배관방법 변경에 대하여 검토하고 보고 드림

1		공사개요

□  공사명: 동부간선도확장(2공구) 전기공사

○ 규모: 녹천교~상계주공 11단지 간(3.2㎞) 도로확장(4차로→6차로)

- 수전설비: 6,500kVA, 가로등: 169본, 터널등: 1,891등(도봉지하차도 2,980m)

○ **********************************************

○ 감리사: ㈜이산

○ ***********

(단위: 원)

**	****	****	****	**
**	***************	***********	**********************
***	************	***********	**********************	**
**	************	**********	**********************	**
**	************	**	**********************	****
**	***********	***********	**********************	**
**	************	***	**********************	****
**	***********	**	*********************	****
**	**************	*************	*********************	**
**	*************	*	*********************	**

2		검토내용

□  관련근거

○ 책임건설사업관리단 동부2감-20-95호(2020. 2.17.)

- ‘거리유도표시등 및 시선유도등 배관방법 변경 실정보고서’

□  개요

○ 거리표시유도등 및 시선유도등 배관방업 변경

구분	당초	변경
배관 시공 상세도
	강제 전선관(노출)	케이블 덕트

○ 변경사유

- 시공성, 미관 등 현장 여건 및 설계자의 의견(시공성, 경제성, 유지관리 등)을 반영하여 케이블 덕트 시공방법으로 변경함.

□  세부내용

○ 주요자재 수량 변경

- 시선유도등

품명	규격	단위	당초	변경	증감	비고
*****	******	*	******	*	**********

- 거리표시유도등

품명	규격	단위	당초	변경	증감	비고
*****	******	*	****	*	**********
*****	******	*	******	***	**********	****
*****	******	*	**	***	**********	****
*****	*********	*	**	******	**********
****	****	*	**	******	**********

○ 공사비 증감 현황

(단위: 천원)

구분	금액			비고
	당초	변경	증감
**********	*******	*******	************
********	******	*****	************
**********	*******	*******	************
*****	******	******	************
*****	******	******	************
******	*******	*******	************

4		검토결과

□  건설사업관리단 검토의견

○ 거리유도표시등 및 시선유도등의 배관방법 변경에 대하여 검토한 결과 도로터널 방재시설설치 및 관리지침(피난대피설비 및 시설)」및「도로안전시설 설치 및 관리지침(시선유도시설)」과「전기설비 기술기준」등 관련규정에 따라 적정하게 작성되었다고 판단되어 강제전선관(노출) 케이블덕트로 변경함이 타당함.

□  보고자 의견

○ 동부간선도로확장 2공구 책임건설사업관리단이 검토한 배관 시공방법 변경 내용이 적정한 것으로 판단되어 (설계변경 계약심사 조건부)승인하고,

○ 계약심사(계약심사과) 후 그 결과를 반영하여 설계변경 하고자 함.

붙임: 책임건설사업관리단 검토보고서 1부.  끝.