문서번호	기후대기과-3236
결재일자	2020.3.2.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	건물온실가스감축팀장	기후대기과장
김태현	최형준	전결 03/02 조완석

2019년 공동주택 지하주차장

LED조명 교체지원사업 결과보고

2020. 02.

기후환경본부

(기후대기과)

2019년 공동주택 지하주차장

LED조명 교체지원사업 결과보고

24시간 조명을 상시 사용하는 공동주택 지하주차장에 대하여 LED 조명을 교체하고 그 결과를 보고드림.

□ 추진근거

◦「서울시 기후변화기금의 설치 및 운영에 관한 조례」제5조 및 동조례 제6조

◦ ’19년 공동주택 지하주차장 LED조명 교체 지원사업 추진계획(기후대기과-5094호, ’19.3.19.]

□ 추진대상 : 지하주차장 조명을 60% 이상 LED로 교체하는 공동주택

□ 추진내용 : LED 조명 교체시 교체비용의 12% 보조

□ 추진실적

◦ LED조명 교체를 위해 공동주택 지하주차장 64개 단지에 178백만원 보조

- LED 조명 총 61,656개를 교체해 연간 10,571MWh의 절감효과 발생

지 원 계 획			지 원 실 적
단지수 (개소)	금 액 (백만원)	계획수량	단지수 (개소)	금 액 (백만원)	보급수량 (개)	에너지절감량 (MWh/년)
79	298	81,168	64	178(60%)	61,656	10,571

※ 지원부진사유(60%) : 당초 계획 대비 LED교체 신청 물량 감소(81,168 ⇒ 61,656개)

▸ 자부담 미확보로 사업포기 15개 단지 발생(19,512개 미교체)

□ 정산결과

(단위 : 원)

자치구	교부액	집행액	집행잔액	발생이자	반납대상액
22개 區	298,085,000	177,811,360	120,273,640	3,902,300	124,175,940

붙임  1. ’19년 공동주택 지하주차장 LED조명 교체 보조금 지원결과 1부.

2. ’19년 공동주택 지하주차장 LED보급사업 정산내역서 1부.

3. 공동주택 지하주차장 LED보급사업 연도별 추진현황(’16~’18년) 1부.  끝.