문서번호	설비부-3174
결재일자	2020.3.3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
추한영		오삼록	03/03 임정규
협조

『남산예장자락 재생 기계설비공사』

관급자재(에스컬레이터) 설계변경 검토보고

2020. 2.

도시기반시설본부

설 비 부

『남산예장자락 재생 기계설비공사』

관급자재(에스컬레이터) 설계변경 검토보고

기 계약된 관급자재(에스컬레이터)의 설계오류에 따른 설계변경을 조달청으로 의뢰하고자 보고드림

◦ 변경내용 : *********************

◦ 변경금액 : **************************************

1		계약현황

○ 건    명: 남산예장자락 재생 기계설비공사 에스컬레이터 제조 설치

○ 계약금액: ************

○ 납품기한: 2019. 12. 31.(계약일 2018. 09. 18.)

○ 계약상대자: ㈜아남테크서비스 대표 문권선

○ 계약물품 규격 및 수량

품 명	규 격	수량	비 고
에스컬레이터(옥외형)	1200(W) 30도-11,000(H)	2대	상행, 하행
에스컬레이터(옥내형)	1200(W) 30도-7,500(H)	2대	상행, 하행

※ 에스컬레이터 설치 개소는 2개소(1개소당 상행, 하행 2대 설치)

2		관련근거

○ 실정보고 검토보고                     - 설비부(`19.06.19.)

○ 에스컬레이터 구매 계약변경 제출       - 남산예장 감리(`20.02.21)

3		변경내용

○ 변경사유 : 건축구조에 적합하도록 기 계약된 에스컬레이터 변경

○ 변경규격 : ************************************

○ 변경금액 : **************************************

4		건설사업관리기술자 검토의견

○ 신규내역 산출서가 적정하게 반영되었으며, 관급자재 제조 설치비는 공사비의 감액이 있으며, 기 시공중인 건축골조와 규격이 일치되므로 적정하다고 판단됨

5		조치의견

○ 규격 변경에 따른 내역변경이 적정하다는 건설사업관리기술자 검토의견이 타당하여 총무부로 조달청 변경계약 의뢰하고자 함

따로붙임 : 계약변경 건설사업관리기술자 검토보고 1부. 끝.