문서번호	시설관리과-4202
결재일자	2020.3.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	기전팀장	시설관리과장		강서수도사업소장
양창진	정진호	변재홍		03/03 정진일
협 조	주무관		김동건
	주무관		강병국

신정증압장 모터펌프 설치계획

2020. 3.

강서수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

신정증압장 모터펌프 설치계획

노후 신정올림터 급수체계 개선을 위하여 신설한 증압장에 모터펌프

설치 사업을 아래와 같이 실시하여 대시민 급수에 만전을 기하고자 함.

【신정증압장 모터펌프 등 설치요청 : 급수운영과-19(2019.1. 2)】

Ⅰ		현 황

□ 급수 현황

증압장	위 치	급수인구	최대급수량	급수방법	최고 급수구역
신 정	양천구 신월동 1055 두산위브(옆)	1,975인	2,592㎥/일	직접 급수	신정동 1216-6 리치빌라(4층)

□ 급수계통도

영등포정수센터

⇨

신정배수지

HWL : 60.8m

LWL : 55.0m

⇨

신정증압장

펌프중심 : 27.5.m

⇨

수 용 가

GL : 54m

□ 모터펌프 현황

증압장	동 력 ㎾(HP)	유 량 (㎥/min)	양 정 (m)	수 량 (대)	형 식	설치년도	비 고
신 정	22(30)	2.7	32	2	편흡입	2005

□ 시설물 전경

기존 올림터 외부	기존 올림터 내부	신설 증압장 외부	신설 증압장 내부

□ 모터펌프 운전현황

증압장	가동시간	대수	최대유량 (㎥/일)	압력(kg/㎠)		제어방식
				인입	토출
신 정	24시간/일	2	1,117	3.2~3.6	5.0~5.2	인버터방식

Ⅱ		설치사유

❍ 장기 사용으로 노후 및 성능 저하

❍ 부식 발생이 매우 심하고, 내용년수(11년) 경과(15년 사용)

※ 급수운영과-25102(2018.10.10.)호 관련 신정가압장 급수체계

개선 사업(노후 가압장 철거 ⇒ 증압장 신설, 붙임참조)

Ⅲ		사업개요

❍ 사 업 명 : 신정증압장 모터펌프 제작구매 설치

❍ 사업규모

증압장	동 력 ㎾(HP)	유 량 (㎥/min)	양 정 (m)	수 량 (대)	비 고
신 정	22(30)	2.3	32	2

❍ 사업기간 : ’20. 3. ~ 7.31.

❍ 사 업 비 : 110백만원

- 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, 시설비및부대비(시설비)

❍ 계약방법 : 지명경쟁입찰

- 관련근거

∙ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제22조

∙ 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제7조 제1항

Ⅳ		추진일정

❍ ’20. 1. 6 : 가압급수 구역 정비(급수운영과)

❍ ’20. 1.15 : 가압급수 구역 인구 자료 확보(동주민센터)

❍ ’20. 3. 2 : 신정증압장 모터펌프 용량검토(본부 시설과)

구 분	현 재	〈 검토결과 〉	비 고
동 력	22Kw(30 Hp)	22 Kw(30 Hp)
유 량	2.7 ㎥/min	2.3㎥/min
양 정	32 m	32 m
수 량	2대(1대 예비)	2대(1대 예비)

❍ ’20. 3.10 : 계약원가 심사의뢰(본청)

❍ ’20. 4.10 : 제작구매 발주 및 계약

❍ ’20. 7.30 : 시운전 및 납품(예정)

Ⅴ		행정사항

❍ 신정증압장 모터펌프 설치(시운전 포함) 후, 기존 올림터 내부에 설치된

모터펌프, 조작판넬, 기타 배관 등 모든 기전설비는 고재 처리(설계반영)

❍ 신정증압장 모터펌프 제작구매, 시운전 및 납품검사 ----- 시설관리과

❍ 신정올림터 시설(구조)물 철거 등 사후 조치--------------급수운영과

붙임 : 1. 신정가압장 급수체계 개선계획(급수운영과) 1부.

2. 설계내역서 1부. 끝.