문서번호	교량안전과-3326
결재일자	2020.3.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		강구조교량팀장	교량안전과장
이제택		박찬규	03/03 하현석
협조
	주무관		이우근

2020년 3월

강구조시설물 안전점검 및 품질확보 계획

2020.  3

안전총괄실

(교량안전과)

2020년 3월

강구조시설물 안전점검 및 품질확보 계획

우리시에서 관리하고 있는 강구조 도로시설물에 대한 안전점검과 공사 중인 강구조시설물의 품질점검을 실시하여 안전성을 확보하고 품질향상에 기여코자 함

Ⅰ		점검 개요

□ 필요성

○ 우리시에서 관리하고 있는 강구조 도로시설물 및 현재 진행 중인  강구조시설물 현장에 대한 안전점검 및 품질관리 필요

○ 정밀안전진단 시행시 강구조물 분야의 점검계획서 검토 및 진단 부실여부 관리가 요구됨

□ 점검 대상 : 총 134개소

계	강구조시설물 안전점검					강구조공사장 품질 점검				정밀안전진단 용역 강구조분야
	소계	한강상 교량	일반 교량	고가 차도	입체 교차	소계	신규	강교 제작장	기존시설물보수공사장
134	99	19	45	32	3	24	5	5	14	11

□ 점검 착안사항

○ 강구조교량팀장과 용접관리 전문관(2)에 의한 전문적 정밀점검

○ 현장 및 서류 점검 병행 시행

○ 매월 3~5개 시설물 점검 및 공정에 따른 공사장 점검

○ 점검결과는 담당부서에 통보하여 시정조치 및 기록관리 시행

Ⅱ		2월 점검 추진실적

□ 추진실적

구분	공용중 시설물 안전점검	신설 및 보수 공사장 (강교 제작장 포함)	비 고
계 획	3개 (천호대교, 모래내고가, 오목교)	3개 현장	<공용중 시설물> ·모래내고가, 오목교 : 3월 점검 예정 <공사장 점검> ·3월 중 강교제작장 점검예정 ·월드컵대교 남단연결로 및 접속교 건설공사 RAMP F에 대한 강교시공상세도 검토후 문제점 및 의견 제시
실 적	1개 (천호대교)	-

※ 2020년 추진실적 누계(2월까지)

· 공용중 시설물 안전점검 : 40개 시설물 계획 중 4개 시설물 점검완료

· 신설 및 보수공사장 안전점검 : 3월 중 월드컵대교 등 점검예정

[시설물 점검]

○ 천호대교

- 점검일시 : 2020.2.21

- 점검구간 : 본선 P3~P7구간 강박스(STB) 4열(1~4열)

- 점검결과 : 신축이음 누수로 하부 강재 및 받침 부식 등 35건 결함사항 적출

신축이음 하부 가로보 부식	신축이음하부 누수
강박스 내부 부식	신축이음 하부 교량받침 주변 부식

Ⅲ		2020년 3월 세부 점검 계획

		공용중인 강구조시설물 안전점검 (4개소)

연번	공사명	관리기관	점검일시	비고
1	모래내고가	교량안전과	5,7일
2	서울역고가	교량안전과	11,13일
3	오금교	강서도로사업소	18,20일
4	오목교(램프)	강서도로사업소	25일

※ 점검일은 내부 일정에 따라 변경될 수 있으며, 팀별 시설물 담당자와 합동 점검

	점검내용(중점관리 사항)
⦁ 교량 받침 이동량 적정유무 확인(강재 수축·팽창량 확인) ⦁ 교량 하부 누수 여부 확인(신축이음하부 등의 누수 발생여부) ⦁ 교량상부 보도 및 차도측 물(눈) 고임 발생 여부 ⦁ 고장력 볼트 체결부(Splice부 등)의 볼트 파단 발생 여부 ⦁ 용접결함으로 인한 시설물의 손상 여부 점검 ⦁ 기타, 강구조물 부식발생 및 도장상태 확인 등

		강구조시설물 건설 및 보수공사장(4개 공사 현장)

연 번	공사명	공사내용	발주부서	비 고
1	월드컵대교 건설공사	폭-31.4m(6차로)] 본선연장-1980m(사장교)	도시기반시설본부 토목부	공정에 따른 순회점검 (강교제작장 점검 포함)
2	광복교~안양교 주변 도로확장공사	폭-27.7m 연장-275m
3	월드컵대교~서부간선직결램프 설치공사	폭-5.75~9m 연장-652.2m
4	올림픽대교남단IC연결램프구조개선공사	폭-7.8m 연장-180m(steel box 거더)

※ 각 공사 일정에 따라 발주부서 및 팀별 담당자와 와 협의하여 현장 점검일 조정

	점검내용(중점관리 사항)
⦁ 강교내부 빗물 유입 가능 여부 확인 ⦁ 점검자 및 보수작업자 이동 편의상태 확인 ⦁ 적절한 자재사용 점검 ⦁ 강교제작 및 용접에 대한 품질관리 이행실태 점검 ⦁ 도장 품질관리 이행실태 점검(대기온도 및 이슬점 등 도장조건 확인) ⦁ 유자격 용접사의 현장작업 여부, 용접화재 등 안전관리 상태 점검

Ⅳ		향후 조치계획 및 행정사항

□ 공사장 지적사항에 대하여는 [시정요청서 발부]하여 발주부서에 통보

○ 지시내용을 “시정요청서 관리대장”에 기록 후 사후관리

□ 강구조 시설물의 점검결과를 담당부서에 통보

○ 문제점의 내용은 “시설물 점검 관리대장”에 기록 후 지속 관리

□ 교량 또는 공사장이 대중교통을 이용하기 어려운 곳에 위치함을 고려하여 점검에 필요한 이동수단(점검차량 또는 업무택시) 사용

붙 임 : 1. 공사장 시정요청서 양식 1부.

2. 강구조 시설물 현황 1부.

3. 강구조 시설물 공사장 현황 1부. 끝.