문서번호	설비부-3238
결재일자	2020.3.4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		건축설비과장	설비부장
전상은		김은덕	03/04 임정규
협조

『퇴계로(2단계) 보행친화공간 재편 전기공사』

사업의뢰부서 요청사항 검토 보고

2020. 3.

도시기반시설본부

( 설 비 부 )

『퇴계로(2단계) 보행친화공간 재편 전기공사』

사업의뢰부서 요청사항 검토 보고

『퇴계로(2단계) 보행친화공간 재편 전기공사』와 관련하여, 건설사업관리단으로부터 제출된 사업의뢰부서 요청사항(공유자동차 주차구획 내 전기배관(배선) 설치) 검토 보고에 대한 검토 결과를 아래와 같이 보고 드림.

Ⅰ
		관 련 근 거

□ 보행정책과-2619(2020. 2.18.), 교통정책과-2635(202. 2.13.)

【퇴계로 도로공간재편 공유자동차 주차구획조성 요청사항 알림】

□ 건설사업관리단 ㈜이산 퇴계-20-20호(2020. 2.28.)

【공유자동차 주차구획 내 전기배관(배선) 설치 검토 보고】

Ⅱ
		공 사 개 요

□ 공 사 명 : 퇴계로(2단계) 보행친화공간 재편 전기공사

□ 공사위치 : 퇴계로2가 교차로 ~ 광희동 사거리

□ 공사내용

- 가로등 분전반 교체(7면), 가로등(주) 교체(113본)

- 교통신호제어기 교체(6면), 교통신호등 교체(78조)

- 기타 배관(배선) 등

□ 계약금액 : *************원

□ 계약기간 : 2019. 9. 2. ~ 2020. 8.31.

□ 계약업체 : *****************

□ 건설사업관리단 : ***

Ⅲ
		검토 내용

□ 사업의뢰부서 요청 사항

○ 공유자동차(나눔카) 전용주차 구역 내 전기차량 충전기 설치에 따른 전원공급(배관‧배선) 요청

□ 검 토 결 과

충전기 위치	검 토 결 과	비 고
중구세무서 앞 (1면)	• 배관(배선)설치 가능여부 : 가능 • 설치방법 : 인접 한전지중PAD에서 지중 배관(배선)으로 포설
원진빌딩 앞 (2면)	• 배관(배선)설치 가능여부 : 가능 • 설치방법 : 인접 한전주에서 지중 배관(배선)으로 포설
호텔 더디자이너스 앞 (2면)	• 배관(배선)설치 가능여부 : 가능 • 설치방법 : 인접 한전지중PAD에서 지중 배관(배선)으로 포설

□ 주요 물량 및 금액 증가 내역

명 칭	규 격	단 위	수 량	증가액(원)	비 고
공유자동차주차구획내 전기배관(배선)공사
소형고압블럭 굴착배관	기계80%+인력20% B=1.2M 1-2열	M	98	1,321,138
아스팔트 횡단굴착(야간)	기계80%+인력20% B=1.2M 1-2열	M	80	4,072,640
맨홀(사각뚜껑포함)	600*600*800(주철뚜껑포함)	EA	5	2,865,960
폴리에틸렌 전선관(지중)	CD-P 36mm	M	188	2,603,612
접지용비닐절연전선	F-GV 6㎟	M	188	343,100
F-CV 2열 포설(가로등)	F-CV 1c-16㎟	M	80	540,880
접지봉	Φ14*1000	EA	3	104,865
F-CV 4열 포설(가로등)	F-CV 1C*10Φ	M	108	1,107,756
소 계				12,959,951
재경비 등				9,018,049
합 계				21,978,000

□ 설계변경금액

구 분	금 액(원)			비 고
	당 초	변 경	증 ‧ 감액
도 급 비	*************	*************	증 21,978,000

□ 건설사업관리단 검토의견

○ 중구세무소 앞 외 2개소 전기차량 충전기 전원공급 배관(배선) 설치는 인접 한전변압기(지중PAD, 전주)에서 전기차량 충전기까지 배관(배선) 가능하며, 이에 따른 사업비 증액(21,978천원)이 필요하다 사료됨.

Ⅳ
		보고자 의견

□ 건설사업관리단 실정보고 내용 검토한 결과,

○ 사업의뢰부서 요청사항인 전기차량 충전기 전원공급 배관(배선) 설치에 관한 설치방법, 추가 사업금액 등 건설사업관리단의 실정보고는 적정하여 승인통보하고

○ 변경된 사항에 대하여 추후 설계변경에 반영하고자 함.

- 퇴계로(2단계)사업 예산집행현황

단위(원)

예산재배정액	구 분	지출원인액	지출액	집행잔액
*************	계	*************	-	***********
	도급비	*************	-
	관급비	***********	-
	이설비	**********	-

붙 임 : 건설사업관리단 검토 보고 1부. 끝.