문서번호	현장민원과-3402
결재일자	2020.3.4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
★주무관		현장민원과장		강서수도사업소장
서주태		추경민		03/04 정진일
협 조
	요금과장				양연화
	급수운영과장				김정수
	시설관리과장				변재홍

2020년 수도계량기 교체 및 정비계획

2020. 3.

강서수도사업소

(현장민원과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	■	□	서울시설공단
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

‘20년 수도계량기 교체 및 정비계획

법정 유효기간 도래 수도계량기의 적기 교체와 고장계량기의 신속한 교체로 공정한 요금부과에 만전을 기하고자 함.

○ ‘20년 교체 예정량 : 38,497개(만기 33,097개, 고장 2,800개, 폐전 2,600개)

Ⅰ		계량기 현황 및 교체실적

추진근거

○ 2020년 수도계량기 수급 및 교체 계획(계측관리과-1334, 2020.2.7.)

○ 수도 계량기 만기 교체 : 계량에 관한 법률 제23조 및 동법 시행령 제21조

- 50㎜ 이하 소형 수도계량기 유효기간(8년) 만기에 따른 교체

○ 고장 수도 계량기 교체 : 서울특별시 수도 조례 시행규칙 제53조

○ 폐전 수도 계량기 철거 : 서울특별시 수도 조례 제22조

수도사업소	서울시설공단
○ 소형계량기(50㎜ 이하) 고장 교체 ○ 만기·동파 교체대상·결과 확인 및 관리 ○ 교체불가 계량기 원인파악 및 조치 ○ 계량기 교체업무 지도감독	○ 소형계량기(50 ㎜ 이하) - 만기·동파 교체, 폐전철거 ○ 대형계량기(50 ㎜ 초과) - 만기·동파·고장 교체, 폐전철거

교체업무 구분

구 분	교체인원	담 당 업 무
사업소 교체직원	2명	계량기 수불, 고장계량기 교체, 폐전철거, 교체장애수전 정비, 민원처리 등
시설공단 교체원	9명	만기교체, 폐전(재건축)철거, 동파교체

교체인원 현황

수전 현황

(2020. 2.29 기준)

구 분	계	13mm	20mm	25mm	32mm	40mm	50mm	50mm 초과
계	353,755	304,525	13,900	11,014	8,668	5,711	1,693	8,244
양 천 구	112,915	98,401	3,957	3,589	2,365	1,470	525	2,608
강 서 구	160,416	139,755	4,794	4,483	4,347	2,960	709	3,368
구 로 구	80,424	66,369	5,149	2,942	1,956	1,281	459	2,268

최근 3년간 교체실적

(단위 : 개)

구 분	목표량	교체실적 (추진율)	만기교체	고장교체	폐전철거
2017년	50,400	51,699 (102.6%)	46,557	1,901	3,241
2018년	43,062	44,483 (103.3%)	34,106	9,133	1,244
2019년	40,858	44,170 (108.1%)	38,722	3,888	1,560

Ⅱ		계량기 교체 및 정비계획

1		수도계량기 교체

교체개요

○ ‘20년 교체 목표량 : 38,497개

(단위 : 개)

합계	만기교체	고장교체	폐전처리
38,497	33,097	2,800	2,600

고장계량기 교체

○ 교체인력 : 수도사업소 교체직원 2명 (전문관)

○ 예상물량 : 2,800개

○ 작업범위 : 소형(50mm이하) 고장(이상) 계량기 교체

※ 급수대책기간(11.15 ~ 익년 3.15) 동파 계량기는 서울시설공단에서 교체

○ 처리기한 : 5일 이내 원칙(단축처리기간 : 3일)

○ 업무처리절차

① 계량기 검침 (계량기상태)	➠	② 교체의뢰 (이상계량기)	➠	③ 작업지시 (계량기교체)	➠	④ 처리결과 (전산입력·통보)
(서울시설공단)		(요금과)		(현장민원과)		(현장민원과)

검정유효기간 도래(만기) 계량기 등 교체

○ 교체인력 : 서울시설공단 9명 (반장 1, 교체원 8)

○ 작업범위

- 소형(50mm 이하) 계량기 만기교체, 폐전철거, 겨울철 동파교체

※ 대형 재건축·재개발 단지에서 이주 지연, 관 노후 등으로 개별적인 철거가

곤란한 경우에는 내부방침 수립 후 일괄철거 업무추진

- 폐전철거 후 누수발생 방지를 위하여 플러그 설치 철저

○ 교체계획

- ’20년 교체 목표량 : 35,697개 (만기 33,097, 폐전 2,600)

- 월별 목표량

(단위 : 개)

목표량	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
35,700	4,000	4,000	4,000	4,000	3,000	3,000	4,000	4,000	4,000	1,700

○ 업무처리절차

① 만기작업지시 (교체대상 생성)	➠	② 만기물량배분 (교체원 지정)	➠	③ 만기교체작업 (현장교체)	➠	④ 작업결과처리 (PDA입력·통보)
(현장민원과)		(서울시설공단)		(서울시설공단)		(서울시설공단)

⑤ 교체결과확인	➠	⑥ 교체장애 (통보)	➠	⑦ 장애정비 (서울시귀책)	➠	⑧ 만기교체 (현장교체)
(현장민원과)		(현장민원과)		(급수·시설관리과)		(서울시설공단)

2		역류방지밸브 설치

추진개요

○ 목   표 : 9,400개

- 본부 급수설비과 목표 설정(급수설비과-651, ‘20.1.18)

▸ 서울시설공단 교체원 인원수에 따른 설치 목표량 배분

▸ 교체원인원수가 조정 될 경우 목표량 변경 될 수 있음.

○ 기    간 : ’20. 3. 1. ~ 11. 30. (만기계량기 교체기간과 동일)

○ 설치인원 : 서울시설공단 9명 (반장 1, 교체원 8)

○ 추진내용

- 설치 불가 건물(감압밸브 설치 아파트 및 소출수 지역)을 제외한

만기교체 대상에 모두 설치

3		교체장애수전 정비

추진개요

○ 정비목표 : 120개 예상 (서울시 귀책분)

○ 정비기간 : 2020. 3. 1 ~ 12. 31

○ 소요예산 : 56,481천원 (배급수비, 교체장애수전 정비)

※ 현장민원과 교체장애수전 정비요청에 의해 공사부서에서 집행

○ 정비방법

- 서울시 귀책 : 교체원 직접교체 또는 공사부서 정비 의뢰

▸ 관노후, 심도장애, 밸브고장, 유니온장애

- 수요가 귀책 : 수용가 협조를 통해 장애해소 후 교체

▸ 주차장애, 옥내설치, 공가세대는 야간, 공휴일 교체

Ⅲ		수도계량기 수불관리 계획

공통사항

○ 수불은 선입선출 원칙하에 관리(담당자 지정 운영)

○ 수도계량기 및 부속자재 운반·보관·설치 시 훼손이나 변형이 발생

하지 않도록 주의 및 분실이나 훼손 시 변상조치

수도계량기 및 부속자재 수불관리

○ 만기, 고장 등에 소요되는 수도계량기 및 부속자재 수령․출고

※ 보관장소 협소로 약 1개월 소요량 수령· 비축

○ 수도계량기 및 부속자재 입· 출고 즉시 자재관리시스템 입력·관리

Ⅳ		행정사항

현장민원과
○ 소형계량기 교체(고장·검정 계량기) 및 서울시설공단 교체업무

지도·감독 (만기·동파 계량기 교체 및 폐전철거 등)

○ 교체장애수전 귀책 사유별 조치 의뢰

○ 소형계량기 및 부속자재 교체 후 작업내역 전산입력 현행화

공사부서(급수운영과, 시설관리과)

○ 서울시 귀책 교체장애수전 정비 협조

○ 만기계량기 교체, 역류방지밸브 설치 관련 긴급누수 발생 시 협조.  끝.