투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	방재시설부장
(경유)
제 목	2020년 제2차 설계변경자문회의(소위원회) 개최

1. 2020년 제2차 설계변경자문회의(소위원회) 개최와 관련입니다.

2. 아래와 같은 개최 계획에 의거 ‘공사감독자’ 및 ‘공사관리관’은 자문자료에 단가결정, 설계자 검토의견, 실정보고서, 발주처의 방침서 등 근거자료를 포함한 자문자료를 작성하여 자문위원에게 사전 배포하여 주시기 바라며, 자문의견은 코로나-19 관련 서면자문으로 대체코자 합니다.

※ 기획담당관-3262(2020.2.27.코로나바이러스감영증-19 관련 서울시 회의운영 기본지침)

3. 자문위원께서는 협의단가 적용의 타당성, 공법변경의 적정성, 설계변경절차 이행의 타당성 등을 면밀히 사전 검토하여 내실 있는 자문이 이루어 질 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 설계변경 자문회의 개최 계획

제 목	2020년 제2차 설계변경자문회의(소위원회)
일 시	2020. 3. 12.(목)
장 소	도시기반시설본부 토목부 12층 회의실(서면자문)
자문위원	위원장 : 토목부 김동현 (토목설계과장) 간 사 : 토목부 차승환 위 원 : 토목부 이성렬 감리단장 신림~봉천터널 도로건설공사(1공구) 유기상*************** 감리단장 동부간선도로확장공사(2공구) 안진섭*************** 감리단장 남부순환로(개봉1단지사거리주변)평탄화공사 이영모***************
자문안건 (6건)	1. 성산대교 남단 성능개선공사	-------	토목부
	1) 강관파일 자재 추가분 사급반영		⇒ 증 103,620천원
	2) 가설교량 복공판 미끄럼방지 포장		⇒ 증 280,940천원
	2. 동부간선도로 확장공사(3공구)	-------	토목부
	1) 본선구간 아스팔트포장보수		⇒ 증 555,500천원
	2) 방음터널 설계보완 검토보고		⇒ 증 770,297천원
	3. 중랑천 생태회복 및 친수문화 조성	-------	방재부
	1) 교량위치 및 천공공법 변경		⇒ 증 571,839천원
	4. 성산대교 북단 성능개선공사
		-------	토목부
	1) 중앙분리대 설치		⇒ 증 109,274천원

붙임 : 자문요청서 6부.  끝.

	토목부장
주무관	차승환		토목설계과장	김동현		토목부장	03/04 김용제
협조자
시행	토목부-4613	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 프리미엄 플라이스 빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2588	/전송	02-3708-2599	/	chsh155@seoul.go.kr	/	부분공개(5)