문서번호	설비부-3325
결재일자	2020.3.4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
이창근		여인웅	03/04 임정규
협 조

- 탄천물재생센터 총인처리시설 전기ㆍ통신공사 -

관급자재 납품기한 연기검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 03.

도시기반시설본부

(설  비  부)

- 탄천물재생센터 총인처리시설 전기ㆍ통신공사 -

관급자재 납품기한 연기 검토보고

우리본부에서 추진 중인『탄천물재생센터 총인처리시설 전기ㆍ통신공사』에 소요되는 관급자재인 배전반 외 5종이 토목공사 공사기간 연장에 따라 당초 계약된 납품기한 내 반입이 불가하여 아래와 같이 연기 조치하여 사업추진에 만전을 기하고자 함
		ㅊ
	ㅊ

Ⅰ
		관 련 근 거

***************************************************

Ⅱ
		공 사 개 요

공 사 명 : 탄천물재생센터 총인처리시설 전기ㆍ통신공사

공사위치 : 강남구 개포로 625 일원(탄천물재생센터 내)

공사내용 : 총인처리시설 45만㎥/일 설치에 따른 전기ㆍ통신공사

계약현황

구 분	전 기	통 신	비 고
도 급 비	2,267,631,000원	124,229,671원
공사기간	2017.11.30.～2021.4.30.	2017.11.23.～2021.4.30.
시 공 사	㈜태림이앤에스 외 2개사	㈜한일이엔에스
사업관리	㈜선진엔지니어링 종합건축사사무소 외 3개사

Ⅲ
		관급자재 납품기한 연기

관급자재 계약현황

계 약 명	계 약 자	계약번호	계약금액(원)	납품기한
**********	******* ********	***********	***********	**********
**********	**** *******	***********	***********	**********
*******	*******	***********	***********	**********
******	*********	***********	***********	**********
********	******	***********	**********	**********
********	******	***********	*********	**********

납품기한 연기

〇 연기사유

⇨ *********************************************************************************************

〇 납품기한 연기

계 약 명	계 약 자	계약번호	계약금액(원)	납품기한
				당초	변경
**********	******* ********	***********	***********	**********	**********
**********	**** *******	***********	***********	**********	**********
*******	*******	***********	***********	**********	**********
******	*********	***********	***********	**********	**********
********	******	***********	**********	**********	**********
********	******	***********	*********	**********	**********

〇 귀책소재 : 서울특별시 도시기반시설본부

〇 지체상금 부과여부 : 미부과

Ⅳ
		조 치 계 획

건설사업관리단의 제출서류 검토 결과 선행공정 지연에 따른 관급자재 납품기한 연장이 필요하다고 판단되어 계약부서(총무부)에 동 계약 건에 대하여 납품기한을 2021년 4월 30일까지 연기 의뢰하고자 함

붙임 : ****************************************

**************************** 1부.   끝.