문서번호	계약심사과-15644
결재일자	2019.9.6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		토목심사2팀장	계약심사과장
박홍		노형근	09/06 김수정
협 조
	설비심사팀장			최주용

내부순환로(월곡IC) 구조개선 기본 및 실시설계 설계VE·계약심사 통합심사 실행계획

2019. 9

재  무  국

(계약심사과)

내부순환로(월곡IC) 구조개선 기본 및 실시설계

설계VE·계약심사 통합심사 실행계획

도기본(토목부) 시행「내부순환로(월곡IC) 구조개선 기본 및 실시설계」에 대해 설계VE전담팀을 구성하고, 설계VE·계약심사 통합심사를 추진하고자 함.

1		추진 근거

□ 건설기술진흥법 시행령 제75조

□ ‘19년 설계경제성 심사 운영계획(계약심사과-4339, ’19. 3. 7.)

□ 설계 경제성 심사 요청(도기본 토목부-15885. ‘19. 9. 3.)

2		심사 개요

□ 신청부서 : 도시기반시설본부(토목부)

□ 사 업  명 : 내부순환로(월곡IC) 구조개선 기본 및 실시설계

□ 위    치 : 성북구 하월곡동 67번지 일대

□ 사업내용 : 내부순환로(월곡IC)와 북부간선도로 및 하부도로와의 연결체계 개선

- 연장(L)=465m(교량 375m, 옹벽 62.5m, 토공 25m)

- 폭원(B)=6.07m(방호벽 포함)

□ 공 사 비 : 18,870백만원

□ 용역기간 : ’18. 4.30. ~ ’21.12.30.

□ 설계공정률 : 90%

3		심사 계획

□ 주요 심사 내용

○ 건설공사의 설계, 시공, 유지관리 등 경제성 분석

○ 공사 시행의 적정성 및 사용자 편의성

○ 시설물 안전 및 고효율 공법 적용의 가능성 등

○ 설계예산서 도서간 일치 여부 및 공사원가 적정성 등

□ 추진 방법 : VE전담팀을 구성하여 설계VE·계약심사 통합심사

○ VE심사팀, 발주·설계·유지관리부서 직원 등 19명 내외 참여

구 분	구 성 원	역 할
총 괄	▸노형근 토목심사2팀장 계약심사과 ▸박홍 주무관 계약심사과	․ 설계VE 계획, 회의 지원 등
리 더	▸김주완 위원 ㈜플러스에이컨설팅	․ 워크숍 준비, 진행 ․ 결과보고서 작성
진행보조요원	▸서희미 요원 ㈜플러스에이컨설팅
외부 검토위원 (5개 분야)	▸(도 로) 이환섭 위원 벽산엔지니어링 ▸(토목구조) 나석현 위원 ㈜건일 ▸(토목시공) 강동규 위원 ㈜다원이지엔 ▸(토 질) 박인철 위원 ㈜경동엔지니어링 ▸(상하수도) 김용순 위원 ㈜이산	․ 기능 분석 ․ 기술 검토 ․ 아이디어 제안 ․ 아이디어 평가 ․ 제안서 작성
내부 검토위원 (2명)	▸(토목) 소영신 주무관 계약심사과 ▸(전기) 황문연 주무관 계약심사과	․ 설계도서 형식 검토 ․ 계약심사
발주부서	▸윤창렬 주무관 도기본 토목부	․ 사업설명, 제안서 검토
유지관리부서	▸김석중 주무관 도로시설과	․ 유지관리 시 특이사항 설명
설계자(8명)	▸박창종 이사 ㈜도화엔지니어링 ▸분야별 설계자	․ 사업설명회 준비 ․ 제안서 원가분석 등

□ 설계VE․계약심사 통합심사 회의 세부일정

일 시	내 용
’19. 9. 19.(목) 10:00~17:00	- 사업설명 및 현장답사, 성능평가, 기능분석 ‣ 장소 : 도기본 14층 회의실 및 현장
’19. 9. 24.(화) 10:00~17:00	- 검토회의 : 기능정리, 대안 구체화, 설계도서 형식검토 ‣ 장소 : 계약심사과 內 회의실
’19. 9. 30.(월) 10:00~17:00	- 최종검토회의 : 제안 채택회의, 설계도서 보완 통보 ‣ 장소 : 계약심사과 內 회의실
’19. 10. 15.(화)	- 설계도서 수정본 제출 (도기본 토목부 ⇒ 계약심사과)
’19. 10. 28.(월)	- 설계VE․공사원가 통합심사 결과 통보 (계약심사과 ⇒ 도기본 토목부)

□ 설계VE·계약심사 통합심사 시행절차

구분		추진 일정		수행 절차		추진 내용
계획수립		’19. 9. 3.		설계경제성 심사 신청 (발주부서)		▸ 심사 신청서 접수
		’19. 9. 5.		설계VE․계약심사 통합심사 계획수립 (계약심사과)		▸ 추진일정, 시행방법 등 ▸ 설계VE팀 구성
설 계 VE ․ 계 약 심 사 통 합 심 사 운 영		’19. 9. 19. ~ ’19. 9. 30. (1일차~12일차)		설계VE 검토회의 【설명회,워크숍,이행회의】 (VE전담팀)		▸ 자료 사전검토 ▸ 사업설명 및 현장답사 ▸ 1,2차 워크숍 - 대안발굴, 제안서 작성 - 설계예산서 검토 - 설계제안 채택회의 ▸ 최종 검토회의 : 의사결정
		’19. 10. 1. (13일차)		VE 제안서 통보 (계약심사과 → 발주부서)		▸ VE 제안서 통보
		’19. 10. 15. (27일차)		설계도서 수정 및 제출 (발주부서 → 계약심사과)		▸ 설계도서 수정 및 제출
		’19. 10. 15. ~ ’19. 10. 27. (39일차)		계약심사 (계약심사과)		▸ 분야별 계약심사 ▸ 설계VE 결과보고서 작성
		’19. 10. 28. (40일차)		통합심사 결과통보 (계약심사과 → 발주부서)		▸ 심사결과 통보

4		소요 예산

□ 총금액 : 9,507천원

○ 외부위원 수당 : 9,007천원

- VE리더(기술사+보고서작성)  : 2,472천원(2,472천원 × 1명)

- 검토위원(기술사)           : 5,695천원(1,139천원 × 5명)

- 진행보조요원(중급기술자)    : 840천원(840천원 ×1명)

※「설계VE 위원 수당 지급기준 개선 계획」(계약심사과-15310, ’18.9.20)에 따라 산출

○ 회의다과비 등 운영비 : 500천원

□ 지급부서

○ 위원  수당 : 신청부서(도시기반시설본부 토목부)

○ 회의운영비 : 계약심사과

5		향후 계획

□ 통합심사 결과 통보 ------------------- ’19. 10. 28.

붙   임 : 1. 설계경제성 심사 요청 공문 1부.

2. 설계경제성 심사 신청서 1부.  끝.