투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	시설공사 설계변경(전체9회, 5차1회) 계약 의뢰(올림픽대교 남단IC)

1. 토목부-4323(‘20. 3. 2.)호와 관련입니다.

2. 우리본부에서 시행중인 『올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사』에 대하여 아래와 같이 설계변경(전체9회, 5차1회) 계약을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사

나. 공 사 비 : 전체 34,180,800,000원 (5차 : 8,627,634,000원)

다. 공사기간 : ‘16. 4. 1.∼‘20. 3. 5. (5차 : ‘20. 1. 17.∼‘20. 3. 5.)

라. 시 공 사 : ㈜덕일 외 2개사

마. 예산과목 : 안전총괄본부 도로계획과, 도로건설, 간선도로망 확충 (도시개발특별회계), 한강상 교량 연결로 구조개선(올림픽대교 남단), 시설비 및 부대비, 시설비

바. 설계변경 현황(전체9회, 5차1회)

******		****	****	*****	**
** ****	****	***************	***************	****
	****	*********************	***********************	******
** ****	****	**************	**************	****
	****	**********************	************************	******

사. 설계변경 사유

○ 전체(9회), 5차(1회)

- 시 재정 여건 등에 따른 연차별 적정예산 미 투입으로 인한 절대공기 부족

붙임  1. 설계변경 검토보고서 1부.

2. 설계변경 요청 공문 및 건설사업관리기술자 검토보고서 1부.

3. 설계변경 내역서 1부.

4. 합의서 1부.  끝.

	토목부장
주무관	이현국		터널건설과장	최진우		토목부장	03/02 김용제
협조자
시행	토목부-4343	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 프리미엄 플라이스 빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2570	/전송	02-3708-2599	/	leehk1@seoul.go.kr	/	부분공개(7)