문서번호	시설관리과-4759
결재일자	2020.3.2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	시설관리과장	중부수도사업소장
이한성	허준행	03/02 박종진
협 조
	시설운영팀장		이유찬
	주무관		이보민

종로구 관내 상수도맨홀 정밀점검 용역 발주계획

2020. 3.

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

도로상 맨홀의 안전성 및 평탄성 향상을 위한

종로구 관내 상수도맨홀 정밀점검 용역 발주계획

서울시 도로상 맨홀정비 관리지침에 의하여 『2020년 종로구 관내 상수도맨홀 정밀점검 용역』발주계획을 보고 드림.

Ⅰ		추 진 개 요

□ 목   적

○ 도로상 상수도 맨홀의 구조안전성 및 평탄성 향상을 통한 시민 안전사고 예방 및 편리하게 이용할 수 있는 도로 환경조성

□ 관련근거

○ 도로상 작업구 설치 및 관리지침(국토부지침 제17호, 2015. 9. 1.)

○ 도로상 맨홀정비 및 관리지침(도로관리과-11510호, 2016. 7. 20.)

○ 상수도맨홀 정밀점검 용역사업 추진계획(본부장방침, 2016. 8. 23.)

○ 2020년 상수도맨홀 정밀점검 추진계획(중부시설관리과-23236 2019.9.9.)

□ 맨홀점검의 종류와 시기

구 분	정기 점검	긴급 점검	정밀점검	초기점검
점검주체	도로관리청 맨홀 관리기관	도로관리청 맨홀 관리기관	맨홀 관리기관	맨홀 관리기관
점검시기	상․하반기 각 1회	필요시	2년 1회 이상	최초 1회
점검범위	외부 조사		외부, 내부조사	외부, 내부조사
점검방법	자체점검		자체점검/업체점검	자체점검/업체점검
책임기술자	-		고급기술자	고급기술자

□ 실시내용

구 분	맨홀외부	맨홀내부
점검내용	• 맨홀 뚜껑 (균열, 단차, 덜컹거림 등) • 맨홀 주변포장(손상 및 도로면과 단차) • 높이조정부(균열, 파손 등)	• 재료시험(반발강도시험 및 탄산화시험) • 맨홀 표면손상 (철근노출 등) • 맨홀 파손 (상부, 벽체, 바닥 콘크리트) • 맨홀 균열 (균열폭 점검) • 맨홀 침입수 및 나무뿌리 침입

Ⅱ		발주 계획

□ 정밀점검 대상

○ 상수도맨홀 *****개소(종로구)

구분	계	소·중형맨홀	원형맨홀	사각맨홀	비고
소 계	******	1,214	3,472	237
종로구	******	1,214	3,472	237

※ 2019.8.28.일 기준 서울시 도로관리시스템 자료(소화전 맨홀 제외)

○ 용역기간: 착공일로부터 ~ 2020.12월

□ 추진일정

○ 2019. 09 : 추진계획 및 자료조사

○ 2020. 01 : 설계서 작성, 기술용역타당성 심사요청

(제1814차 기술용역타당성심사 결과 통보)

○ 2020. 01 : 구매규격 사전공개 및 기술용역 사업수행능력 세부평가기준협의

○ 2020. 02.  구매규격 사전 공개(행정지원과, 발주)

○ 2020. 02.  용역발주

○ 2020. 03 ~ 12 : 사업착수, 준공 2개월 전 건설기술심의위원회 심의

○ 2020. 12 : 준공용역(용역결과 보고 및 서울시 포장도로관리시스템입력)

□ 사업비

○ 소요예산 : *********

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 수선교체유지비(수선유지비)

- 상수도맨홀 정밀점검

Ⅲ		계약방법

□ 입찰방식

○ 입찰방법 : 일반공개경쟁입찰

○ 입찰참가자격 : 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제9조 및       동법시행령 제11조 규정에 의거 수리시설분야 안전진단전문기관으로       등록된 업체이며 국토교통부장관이 인정하는 수리시설분야 정밀안전       진단교육을 이수한 책임기술자를 보유한 업체

○ 사업수행능력평가(PQ) 및 적격심사 대상임

- 근거 : 건설기술진흥법 시행규칙 제28조 제1항 2호[별표4](2019.2.25.),                       서울특별시 기술용역 사업수행능력 세부평가기준 (2016.12.2.),                 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준(행자부 예규 제48호, 2019.10.8.)

○ 낙찰자 결정방법

- 방법 : 정밀점검 및 정밀안전진단 용역 참가업체중 “사업수행능력 세부  평가기준”에 의거 최고점수 획득업체

배점한도(100점) = 사업수행능력평가(34점) + 책임기술자평가(1점) + 지역업체참여도(3점) + 경영상태(2점)            + 입찰가격(60점) + 기술인력(△10점)+계약질서준수(△1점)

※ 추정가격 5억 미만으로 P,Q대상 기술용역에 따라 적격심사 실시

Ⅳ		행정사항

□ 본청 재무국 재무과 “용역계약”의뢰 : 2020. 3월 중

□ 계약 및 착수 : 2020년 3월 중

□ 본청 기술심사담당관 “건설기술심의”요청 : 2020. 10월

□ 정밀안전점검 용역 준공 : 2020. 12월

붙임 : 1. 용역설명서 1부.

2. 과업내용서 1부.

3. 사업수행능력 세부평가기준 1부.

4. 설계내역서 1부.  끝.