문서번호	설비부-3073
결재일자	2020.3.2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		건축설비과장	설비부장
박희준		김은덕	03/02 임정규
협조

『광복교~안양교 주변 도로확장 전기공사』

물가변동으로 인한 계약금액 조정(4회) 검토보고

2020. 3.

도시기반시설본부

(설비부)

『광복교~안양교 주변 도로확장 전기공사』

물가변동으로 인한 계약금액 조정(4회) 검토보고

『광복교~안양교 주변 도로확장 전기공사』와 관련하여, 계약상대자로부터 물가변동에 의한 계약금액 조정(4회) 요청이 있기에 물가변동 금액 적정 여부를 검토 보고함.

Ⅰ
		관 련 근 거

□ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제22조, 동법 시행령 제73조, 동법 시행 규칙 제72조

□ 공사계약 일반조건 제22조(물가변동으로 인한 계약금액의 조정)

□ 건설사업관리단 광안건 제2020-72호(2020.2.12.)

【물가변동 관련 계약금액 조정 보고(4회)】

Ⅱ
		사 업 개 요

□ 사 업 명 : 광복교~안양교 주변 도로확장 전기공사

□ 사업내용 : 가로등 설비 1식, 경관조명설비 1식

□ 공사기간 : 2016.11.14.~2021.12.31.(총차)

□ 공사위치 : 구로구 개봉동 ~ 구로동 구로IC 앞

□ 도 급 액 : ************

□ 계약업체 : **************

□ 계약현황

차 수	계약금액(원)	준공금액(원)	계약기간	비 고
***	***********	***********	2016.11.14. ~ 2021.12.31.
***	***********	***********	2016.11.14. ~ 2017.12.13.	준 공
***	***********	***********	2017. 9.22. ~ 2018.11.30.	준 공
***	***********	***********	2018.12. 1. ~ 2020.11.30.	기성 1회

Ⅲ
		계약금액 조정(ESC) 검토 내용

□ 물가변동(ESC) 조정 조건 충족 여부

구 분	제1회	충족여부	비 고
조 정 방 법	지수조정	충족(계약서 확인)
기 준 시 점 (직전조정일)	2018. 9. 1.	충족(90일 이상)	※ 2019.08. 31. 기준 경과기간 363일(충족) 조정률 2.20%(불충족)
비 교 시 점 (조정기준일)	2019. 9. 1.
경 과 기 간	364일
조 정 률	4.49%	충족(3% 이상)

□ 물가변동 현황

구 분	기준시점	비교시점	경과기간	조정률	물가변동금액	비고
1회	2016.10.25.	2017. 2. 9.	106일	3.40 %	***********
2회	2017. 2. 9.	2018. 1. 1.	325일	5.13 %	***********
3회	2018. 1. 1.	2018. 9. 1.	242일	4.41 %	***********
4회	2018. 9. 1. (직전조정일)	2019. 9. 1. (조정기준일)	364일	4.49 %	***********	금회
계					***********

□ 계약금액 조정(제4회) 세부검토 내용

구 분		금 액	비 고
물가변동 대상공사의 계약금액(A)		************
물가변동 적용제외금액 (B)		************
물가변동 조정기준일 현재공정률	예정공정률	******
	실행공정률	******
물가변동 적용대가 (C)		************	C=A-B
물가변동조정률 (D)		*****
물가변동등락 대상 조정금액(E)		***********	E=C*D
물가변동조정적용금액		***********

□ 계약금액 조정 금액

(단위 : 원)

차 수	계약금액	조정금액	증 ․ 감액	비 고
총 차	***********	***********	************
3 차	***********	***********	************

□ 건설사업관리단 검토의견

○ 상기와 같이 물가변동으로 인한 계약금액 조정 내역을 검토한 결과, 물가변동 조정 경과기간이 기준시점 일로부터 90일 이상(364일) 경과하고,

○ 지수조정률이 100분의 3이상(4.49%) 증가 되어 관련 규정에 의거 상기와 같이 물가변동 조정금액으로 정함이 타당하다 사료됨.

Ⅳ
		보고자 의견

□ 『광복교~안양교 주변 도로확장 전기공사』관련 건설사업관리단의 물가변동으로 인한 계약금액 조정(제4회) 검토보고가 적정하다 판단되어 이에 대한 승인 통보 후 변경계약을 진행하고자 함.

붙 임 : 물가변동 관련 계약금액 조정(제4회) 보고 1부. 끝.