문서번호	시설개선과-1925
결재일자	2020.3.3.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설개선과장
박희영		代안봉환	03/03 윤정한
협조

구의야구공원 주차장 주변 녹지대 정비공사

실시설계용역 준공기한 연기보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 3.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

구의야구공원 주차장 주변 녹지대 정비공사

실시설계용역 준공기한 연기보고

『구의야구공원 주차장 주변 녹지대 정비공사 실시설계용역』에 대한 업무수행 중 아래와 같이 용역기간 연장사유가 발생하여 준공기한을 연기하고자 함.

Ⅰ		용역개요

□ 용 역 명: 구의야구공원 주차장 주변 녹지대 정비공사 실시설계용역

□ 용역기간: 2020. 1. 29. ~ 2020. 3. 8. (40일)

□ 계약금액: ************

□ 계약업체: ****************

□ 용역내용: 노후 조경시설물 정비 실시내역 설계

산책로 조성 및 녹지대 토사유출 방지시설 정비 검토

Ⅱ		보고내용

□ 용역 준공기한 연장

❍ 당초  2020. 3. 8.→ 변경 2020. 3. 23.(15일 연장)

❍ 연장사유: 용역 중간보고회 결과 검토사항에 대한 실시설계 반영을 위한 용역기한 부족

❍ 귀책소재: 발주처 [지체상금: 미부과]

Ⅲ		조치의견

□ 용역준공기한 연기코자함

❍ 용역 준공기한 연기 : 2020. 3. 23.  끝.