문서번호	시설개선과-2005
결재일자	2020.3.5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설개선과장	체육시설관리사업소장
임신택		윤정한	03/05 김정열
협 조
	운영기획과장			김남대
	주무관			백문선
	주무관			황미령

- 2020년 잠실야구장 환경개선공사 -

시공사 실정보고 등 설계변경 검토 보고(1회)

2020. 2.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

- 2020년 잠실야구장 환경개선공사 -

시공사 실정보고 등 설계변경 검토 보고(1회)

『2020년 잠실야구장 환경개선공사』와 관련하여 시공사 실정보고 및 야구장 관리본부 요청 사항 등에 대한 설계변경 검토 보고임

공사개요

○ 공 사 명 : 2020년 잠실야구장 환경개선공사

○ 공사개요

- 내야 관람석(블루) 등·좌판 교체 840석

- 기존 외야 관람석(폭 420mm) 철거 5,833석, 신규 관람석(폭 465mm, 500mm) 설치 5,768석

- 외야 관람석 바닥 정비 및 방수 4,290㎡

- 외야 관람석 최상부 통로 관람석 데크설치(경사로) 163m

- 기존 안전난간 철거 및 강화유리안전난간(관급공사) 설치 178m 등

○ 사 업 비 : ***************

- *********************

- ****************************

○ 공사기간 : 2020. 01. 23. ~ 03. 14.

○ 시 공 사 : ************

○ 추진경위

- 2020. 01. 07    공사발주

- 2020. 01. 16    공사계약

- 2020. 01. 23    착공

시공사 실정보고 등 설계변경 보고 사항

○ 외야관람석 상부 데크 설치방법 변경

- 외관 및 난간설치가 용이하도록 합성목재데크에서 몰탈(SUS틀) 타설로 변경(데크 측면부 외관 제작 어려움)  *****************

설치위치(외야관람석 최상부)

당초 도면(합성목재데크 설치)

변경 도면(스테인리스틀 설치, 몰탈타설, 폴리우레아 마감,

경사에 맞추어 1블럭당 1~5단 끊어서 설치)

○ 관람석 수량 변경

- 외야관람석 최상부 데크 설치방법 변경에 따른 수량 조정 (감 72석)

․최상부 데크 형태에 맞추어 의자설치 개수 조정, 전광판 좌우 3개 블럭 최상부 관람석 미설치 및 의자배열에 따른 수량 조정 등

****************

※외야 관람석 현장시공시 배열에 따라 약간의 수량 증‧감이 발생할 수 있음

변경전 좌석도면

변경후 좌석도면

(전광판 좌우 3개블럭 데크 미설치로 관람석 설치 제외)

- 내야블루석 등좌판교체 수량 조정 (감 110석)

․내야블루석은 전체 2,240석 중 840석(1층 전체+2층 1개블럭 일부) 교체 수량이 설계되어 있었으나, 1층 730석에 대하여만 교체 진행

****************

○ 외야바닥 방수 및 관람석 논슬립 수량 증가

- 외야관람석 최상부 데크 설치방법 변경에 따라 해당부위 바닥 방수 실시 및 전광판 하부 바닥 상태 양호로 공사 범위 제외

****************

외야관람석 최상부 바닥 방수	전광판 하부 바닥 상태

- 관람석 논슬립 설계누락에 따른 반영

․이용자의 안전을 위하여 관람석 의자 앞 통로에 논슬립 설치

*****************

관람석 의자 앞 통로 논슬립 설치 구간

○ 투수피칭장(불펜) 환경개선공사 실시

- 야구장 관리본부 요청(2019.7.)에 따른 개선 실시

․기존 메시휀스, 안전가드, 폴리카보네이트 교체 및 주변 재도장 실시

*****************

투수피칭장(불펜) 현황

○ 강화유리안전난간 추가 설치 (증 42m)

- 외야관람석 최상부 전면부만 설치 반영되어 있어 관람객 안전을 고려하여 측면부 설치 추가 반영 ******************

(기존)전면부 강화유리 난간 설치	(변경)측면부 난간 추가 설치

○ 제경비 항목중 일부 정산

- 건강보험, 연금보험, 노인장기요양보험, 환경보전비, 하도급대금지급보증수수료, 건설기계대여대금지급보증수수료 정산 ****************

- 퇴직공제부금비 감액 ***************

※준공시 퇴직공제부금비 및 산업안전보건관리비 최종 정산(감액) 예정

계약금액 조정

○ 공사비 증․감 내역

(단위:원)

구 분		당 초	변 경	증 · 감	비 고
총 공 사 비		*************	*************	************
도급비	공 급 가 액	*************	*************	************
	부가 가치세	***********	***********	************
	계	*************	*************	************
관급자재비		**********	***********	************

조치의견

○ 위와 같은 설계변경 사항에 대하여 관급자재 추가 구매하고, 공사설계변경은 외야관람석 의자설치 수량이 확정 되는대로 별도 보고 후  실시하고자 함.

붙임  1. 시공사 실정보고서 1부.

2. 설계변경내역서 및 수량산출서, 변경설계도면 각 1부.  끝.