문서번호	도로보수과-2129
결재일자	2020.3.5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	강서도로사업소장
정회곤		류태용	03/05 박문희
협조

2020년 포장도로 긴급 복구공사 발주계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 3.

강서도로사업소

도로보수과

2020년 포장도로 긴급 복구공사 발주계획

2020년 노후 포장도로 정비공사 추진계획에 의거『포장도로 긴급 복구공사(연간단가)』발주 계획을 수립하여 관내 포장도로 유지관리에 만전을 기하고자 함

1		공사개요

❍ 공 사 명 : 2020년 포장도로 긴급 복구공사(연간단가-강서)

❍ 공사규모 : 절삭후 덧씌우기 20a, 소규모파손 포장복구 237a

긴급출동/대기 1,382hr, 공동 복구 95hr

❍ 공사위치 : 강서구, 양천구, 구로구, 영등포구 일부 시도상

❍ 공사기간 : 착공일로부터 ~ 2020.12.13.

2		관련근거

❍ 2020년 노후포장도로 정비공사 추진계획(도로관리과-3773호, ‘20.02.27.)

❍ 도로사업소 야간 긴급출동 외주추진 예산 재배정 알림(도로관리과-1029호,‘20.01.17.)

❍ 지반침하 예방사업(공동복구공사)예산 재배정 알림(도로관리과-3397호,‘20.02.24.)

3		발주계획

❍ 포장도로 긴급 복구공사와 부대공사 발주

- 포장도로 긴급 복구공사(연간단가) 별도 발주

- 차선 재도색 공사는『노면표시 일상유지 보수공사』와 통합 발주

- 건설폐기물 운반 및 처리용역은 굴착복구 공사와 통합 발주

- 도로사업소 야간 긴급출동 외주추진 긴급복구 연간단가에 포함 발주

- 지반침하 예방사업(공동복구공사)긴급복구 연간단가에 포함 발주

- 관급자재(조달구매) :  WC-2(3등급),WC-4(3등급), BB-2(순환)

❍ 예산(재배정)액 : 2,406백만원

(단위 : 백만원)

계	긴 급 복 구				야간 긴급 출동	공동복구
	소계	도급비	관급비	폐기물등 이설비		소계	도급비	관급비	폐기물
2,406	1,972	1,238	395	339	297	137	120	10	7

❍ 예산과목

- 긴급복구

도로시설물관리, 도로및도로부속물관리(도시개발), 노후포장도로정비공사, 시설비 및 부대비, 시설비

- 야간 긴급출동

도로관리과, 도로관리(6개 도로사업소), 사업소 환경개선, 도로사업소 사무환경개선, 일반운영비, 공공운영비

- 공동복구

도로관리과, 도로시설물관리, 도로 및 도로부속물관리(도시개발), 도로함몰예방사업, 일반운영비, 시설비

4		입찰 세부사항

❍ 공 사 명 : 2020년 포장도로 긴급 복구공사(연간단가-강서)

❍ 입찰방법 : 일반경쟁입찰

❍ 계약법령

-「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한법률」제9조 및 동법시행령 제11조, 제13조, 제20조

❍ 입찰참가자격

-「건설산업기본법」제8조 및 동법시행령 제7조에 의한 포장공사업 면허소지업체

- 지역의무공동도급(공동이행방식)대상공사 이므로 입찰공고일 전일부터 입찰일(낙찰자는 계약체결일)까지 서울특별시에 주된 영업소를 둔 자를 반드시 구성원으로 하여야 하며, 지역업체의 시공 참여비율은 49%이상 이어야 함.(단, 서울시에 소재한 업체는 단독참여 가능)

- 지역의무공동도급에 따라 공동수급체를 구성하는 경우 해당 지역업체와 그 외 지역업체간에는 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 계열사, 상호출자 제한 기업집단 소속 계열회사가 아니어야 함

❍ 하자기간 : 준공 검사일로부터 2년간

5		향후계획

❍ 2020. 03. : 일상감사의뢰 및 공사발주

❍ 2020. 03. : 입찰공고

❍ 2020. 03. : 공사계약 및 착공

❍ 2020. 12. : 공사준공

붙 임  1. 2020년 노후포장도로 정비공사 추진계획.

2. 도로사업소 야간 긴급출동 외주추진 예산 재배정 알림.

3. 지반침하 예방사업(공동복구공사)예산 재배정 알림.

4. 설계내역서 1부.  끝.