“기분 좋은 변화, 품격 있는 강남”

등록번호	어르신복지과-5817		★주무관	어르신지원팀장		어르신복지과장		복지생활국장		부구청장
			김준영	김길주		배근희		이광우		전결 03/05 하철승
등록일자	2020.3.4.
결재일자	2020.3.5.
공개구분	부분공개(5)
			협조자
					재무과장		지영애
					계약팀장		한혜란

- 안전하고 쾌적한 경로당 관리를 위한 -

재너머경로당 안전점검 사항 개보수 공사계획

□ 공사명: 재너머경로당 안전점검 사항 개보수 공사
□ 위  치: 서울특별시 강남구 청담동 16-16
□ 추진기간 : 2020. 3. 9.~4. 8.
□ 주요 공사내용 : 안전점검 사항 개보수 공사

❍ 동쪽 장독대 슬래브 균열 보강(철근 콘크리트 강화)

❍ 동쪽 옹벽 계단 안전난간 설치(알루미늄 펜스 설치)

❍ 2층 현관 난간처마 공사

❍ 화장실 개선 공사(위생기 교체, 타일 미끄럼 보수) 등

□ 소요예산 : 금21,648천원

❍ 공사비 : 금21,648천원/수의계약(소액)

2020.  3.   .

	강 남 구
(		어르신복지과	)

【 관련 규정 및 제반사항 사전검토서 】
검토분야	확인 및 적시사항
관련 규정 및 근거	현행 관련 법, 시행령, 조례, 규칙, 관련 지침 등 근거를 모두 검토하고 적시하였습니까?
	• 사회복지사업법 제34조4(시설의 안전점검 등) • 재난 및 안전관리 기본법 제30조(재난예방을 위한 긴급안전점검 등)
추진 경위	추진 경위는 무엇입니까?
	• 어르신복지과-542(2020. 1. 7.)호 「2020년 노인복지시설 개·보수 공사 추진계획」
예산 사항	산출 근거 및 기준 또는 예산확보 및 투입우선순위 등의 내용을 검토하고 적시하였습니까?
	• 근거 및 기준을 검토한 결과 적정함
수혜자 및 범위	이 업무(사업)관련 수혜자는 누구이며 수혜범위를 파악해 보았습니까?
	• 대상: 경로당 이용 어르신, 주민 등
분 야 별 검토사항 [계속 : o ] [신규 : ]	이 업무(사업)과 관련하여 아래 등 제반사항을 검토해 보았습니까? ⓛ 관련부서 협조 ----------------- ( ㅇ ) ② 이해관계인 및 예상되는 민원 ----------------- ( ) ③ 추진 상 사전 걸림돌 ----------------- ( ) ④ 미래행정 수요예측 ----------------- ( ) ⑤ 시장조사 ----------------- ( ) ⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교 ------ ( ) ⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규 ----------------- ( ㅇ ) ⑧ 행사관련 의전 및 선거법 ----------------- ( ) ⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수 ----------------- ( )
타 기관 사 례	타 구 사례를 파악, 비교해 보았습니까?
	• 해당사항 없음
전문가 자 문	전문가의 자문이나 검토를 받았습니까?
	• 해당사항 없음

- 안전하고 쾌적한 경로당 관리를 위한 -

2019년 동절기 안전점검 결과 다수의 지적사항 및 위험사항이 제기되어 동쪽 옹벽 안전난간 설치, 슬래브 균열 보수, 화장실 미끄럼 방지공사 등 개선 보수 공사를 휴관기간동안 신속히 실시하여 안전하고 쾌적한 경로당 관리에 만전을 기하고자 함

재너머경로당 안전점검 사항 개보수 공사계획

Ⅰ		추 진 근 거

□ 사회복지사업법 제34조4(시설의 안전점검 등)

□ 재난 및 안전관리 기본법 제30조(재난예방을 위한 긴급안전점검 등)

□ 2019년 동절기 노인복지시설 안전점검 결과(어르신복지과-31175호, 2019. 12. 23.)

□ 2020년 노인복지시설 개·보수 공사 추진계획(어르신복지과-542호, 2020. 1. 7.)

Ⅱ		시설현황

□ 재너머경로당

규 모	지하1층/지상2층	안전점검 지적사항	- 동쪽 장독대 슬래브 붕괴 위험 - 동쪽 옹벽 계단 추락 위험 - 난간 처마 파손 - 안방 화장실 미끄러움 - 지붕 위 낙엽 적재
연 면 적	291.1㎡
준공일자	1982. 7. 30.
구 조	연와조
이용인원	21명

※ 2019년 하반기(동절기) 안전점검 지적사항 중 시설 위험사항 등이 있어 긴급히 보수 실시

Ⅲ		공사개요

□ 공사명: 재너머경로당 안전점검 사항 개보수 공사

□ 위   치 : 강남구 청담동 16-16

□ 기   간 : 2020. 3. 9.~4. 8.(착공일로부터 30일)

□ 공사내용

❍ 동쪽 장독대 슬래브 균열 보강(철근 콘크리트 강화)

❍ 동쪽 옹벽 계단 안전난간 설치(알루미늄 펜스 설치)

❍ 2층 현관 난간처마 공사

❍ 화장실 개선 공사(위생기 교체, 타일 미끄럼 보수)

❍ 기타 보수 요청사항

Ⅳ		세부추진계획

□ 발주계획공개(제안서 접수) 및 계약 : 2020. 3. 5.~3. 8.

□ 공사시행

❍ 기    간 : 2020. 3. 9.~4. 8.(착공일로부터 30일)

❍ 계약방법 : 수의계약(소액)

❍ 계약근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조제1항제5호

❍ 업체선정 : 변경된 수의계약절차에 따라 우리 구 수의계약시스템에 발주계획 공개 후 제안서를 접수한 업체 선정

❍ 선정기준 : 추정가격이 2,200만원 이하 소액공사로, 전문건설업인 “시설유지관리면허”가 있는 우수한 전문건설업체와 계약을 체결하여 안전점검 지적사항 및 민원을 신속히 해결하고자 함

□ 공사 세부내역

위 치	공사내용	현장사진
2층 동쪽	❍ 동쪽 장독대 슬래브 균열 보강 - 붕괴위험 슬래브 철근 공사 - 붕괴위험 슬래브 콘크리트 공사 ⇒ 철근 콘크리트 시공으로 균열 보강 ❍ 동쪽 옹벽 안전난간 설치 - 알루미늄 펜스 설치 ⇒ 난간이용시 어르신 낙상 위험 예방 ❍ 동쪽 옹벽 균열 보수 - 콘크리트 접착제 시공 ⇒ 옹벽 붕괴 위험 예방
2층 현관	❍ 2층 난간처마 공사 ⇒ 난간처마 들뜸(낙하위험) 보수
1층 안방	❍ 화장실 개선 공사 - 안방화장실 타일 미끄럼 보수 - 위생기 설치 ⇒ 미끄러운 재질의 타일로 인한 낙상사고 예방 및 노후 양변기 교체

Ⅴ		소요예산

□ 공사비 : 금21,648천원

구 분	금 액
공 사 비	금이천일백육십사만팔천원(금21,648,000원)
공급가액	금일천구백육십팔만원(금19,680,000원)
부가가치세	금일백구십육만팔천원(금1,968,000원)

□ 예산과목 : 어르신복지과, 노인복지증진, 노인복지시설 운영 및 지원, 노인복지시설 유지 관리, 시설비및부대비(401), 시설비(01)

Ⅵ		행정사항

□ 발주계획 수립·공사발주 및 감독------------------어르신복지과

□ 공사내용 사전 경로당 홍보 및 협조 ------------------- 청담동

□ 재정합의 및 계약 체결 ----------------------------- 재무과

붙임  1. 산출내역서 1부.
2. 시방서 1부.  끝.