코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	변경계약 의뢰(중림2길 마중마당 조성 설계 용역)

1. 공공재생과-13410(2019. 12. 10.)호와 관련입니다.

2. 우리과에서 추진 중인 「중림2길 마중마당 조성 설계 용역」에 대하여 아래와 같이 계약변경을 외뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 중림2길 마중마당 조성 설계 용역

나. 기    간 : 2019. 12. 05. ~ 2020. 03. 03.

***********************************

라. 용 역 사 : 에이앤엘스튜디오 건축사사무소(대표 : 신민재)

마. 설계변경 내용

******************************************************************************************************

바. 변경사유

- 중림2길 마중마당 조성에 대한 주민 민원 의견 수용에 따른 기간 연장 필요

- 서울로 7017과 회현길 이외의 다른 2단계 연결길과의 조화를 위한 기존 설계 디자인 디벨롭 필요

붙  임 : 1. 검토결과보고 1부.
2. 변경합의각서 1부.
3. 준공기한 연기 의뢰서 1부.  끝.

	공공재생과장
주무관	박영우		공공재생정책팀장	신명승		공공재생과장	03/05 이동일
협조자	계약1팀장	조현
시행	공공재생과-2710	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	부분공개(5)