문서번호	정수시설과-712
결재일자	2020.3.5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
김영수		김수영	03/05 백상희
협 조
	주무관			함인석

“상수도사업본부 발족30년!, 수돗물 통수 111년!, 믿고 마시는 아리수!”

착수정주변 산지비탈면 정비사업

실시설계용역 준공보고

2020. 3.

강북아리수정수센터

(정수시설과)

착수정주변 산지비탈면 정비사업

실시설계용역 준공보고

정수센터 착수정 주변 산지비탈면(급경사지)의 황폐지 안정과 사면보호 및 식생기반을 조성하고자 산지비탈면 정비사업(산지보존)을 위한 실시설계용역을 시행하고 결과를 보고드림.

Ⅰ		산지비탈면(급경사지) 현황

□ 산지비탈면(급경사지) 현황

◯ 사면위치 : 강북아리수정수센터 착수정~침전지(4계열)주변

◯ 사면규모 : 높이 1m~13m,  연장 180m, 가로장방형

◯ 산림현황 :

구 분	면 적	임 황	방 위	경사도	토 양	토 심	건습도	식 생
	3,500㎡	잡목식재	북동향	60°이상	사질토	60cm미만	약건조	초본류

□ 산지비탈면(급경사지) 특징 및 문제점

◯ 토사유실 및 침식으로 사면일부 유실 및 황폐화 진행

◯ 위험수목 존치로 전도시 비탈면 붕락 및 토석류등 낙석발생 우려

◯ 산마루측구(배수로) 노후파손으로 배수기능 상실

◯ 경계울타리 노후 및 처짐등 변형 발생

사면 황폐화 진행	배수로기능 상실	울타리 변형 및 파손

Ⅱ		산지비탈면 정비사업 실시설계용역 추진현황

□ 설계용역 개요

◯ 용 역 명 : 착수정주변 산지비탈면 정비사업 실시설계용역

◯ 용역기간 : ‘20. 2.11 ~ ’20. 3.02

◯ 용 역 비 : 10,830천원(원인행위액 11,400천원)

◯ 도 급 자 : 늘푸른산림엔지니어링  대표 : 왕한철

◯ 용역목적

- 산지비탈면 정비(산지보존)로 안전사고 예방 및 시설물 보호

- 위험수목 제거 및 식생기반 조성

- 방호울타리 교체로 방호기능 강화 및 외부 출입자 통제

- 사면 불완전요인 해소 및 미관향상으로 공익적 가치 증대

□ 과업수행 추진공정

공 종	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	비고
현지조사 및 측량시행											용역중간 보고회 (20.02.19)
공법선정 및 과업설계
성과물 납품

Ⅲ		산지비탈면 정비사업 주요설계 내용

□ 산지비탈면 하부기초 공법선정 → 콘크리트옹벽

◯ 급경사지 경사를 완화하고 토사저항에 대한 지지력 확보

◯ 기초지반 지지력과 외부 전도활동에 내구성이 강한 옹벽공법 선정

□ 배수로형식 및 재질 결정 → 콘크리트 U형측구(현장제작)

◯ 기존의 PE배수로의 단점 보완 및 유지관리 측면 고려

◯ 장기간 노출 및 강우시 유수의 침투로 인한 배수로간 탈락방지 해소

□ 비탈면녹화 및 식생기반 조성 → 종비토 뿜어붙이기 공법

◯ 대상지의 지형적 특성(일조량 풍부)을 고려한 식생기반 조성

◯ 급경사면에 적용가능한 녹화공법 선정

Ⅳ		산지비탈면 정비사업비

□ 사업비 산출****************

◯ 사업비 산출내역

(단위:천원)

총사업비	설계용역비	공 사 비
		도 급 비	관 급 비
*******	******	*******	*******

※ 관급자재비 산출내역

(단위:천원)

공 종	규 격	단위	수량	금 액
****	******************************************
*********	**************	**	***	******
***********	*****	*	*****	******
*********	*************	*	***	******

◯ 사업비에 대한 계약심사(상수도본부)로 최종 공사비 반영

- 계약심사 대상 : 도급공사비, 관급자재비(식생토)

□ 예산과목

◯ 상수도사업비용. 영업비용. 정수비. 수선교체비(수선유지비)

◯ 향후추진 계획(우기전 완료목표)

- 계약심사(안전총괄과) ------------------------------ 2020. 3.

- 공사발주 및 물품구매------------------------------- 2020. 3.~ 4월

- 공사시행 및 준공----------------------------------- 2020. 6.

Ⅴ		행 정 사 항

□ 실시설계용역 준공 및 계약심사(안전총괄과) 시행

□ 관급자재(식생토) 특정기술(물품)심사위원 개최(4월중)

붙 임 : 설계용역 성과물(설계도서) 1부. 끝.