문서번호	공공재생과-2704
결재일자	2020.3.5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		공공재생정책팀장	공공재생과장
박영우		신명승	03/05 이동일
협조

(중림2길) 마중마당 조성 설계 용역 관련 용역 계약 변경(기간연장) 검토 보고

2020. 3.

도시재생실

(공공재생과)

(중림2길) 마중마당 조성 설계 용역 관련

용역 계약 변경(기간연장) 검토 보고

서울로 2단계 연결길 조성 사업 관련 중림2길 마중마당 조성 설계 관련하여 기간연장에 대한 계약 변경이 필요하여 이를 검토하고 보고함

Ⅰ		개요

□ 용 역 명 : (중림2길)마중마당 조성 설계 용역

□ 용역기간 : ‘19. 12. 05~’20. 03. 03(3개월)

□ 계약금액 : 15,670천원

□ 계 약 자 : 에이앤엘스튜디오건축사사무소(대표자 : 신민재)

□ 과업내용 : 중림2길 마중마당 조성 설계

○ 서울로2단계 연결길 중 중림2길 특성화

○ 보행로 포장 및 재정비, 차도 포장 등

○ 포장 패턴, 색상, 질감 및 필요시 상징시설물 설치 등

Ⅱ		계약 변경 내용

□ 계약변경 내역

구 분	당 초	변 경	증 감	비고
과업내용	∙서울로 2단계 연결길 중 중림2길 특성화 ∙도로 포장 및 정비 ∙포장 패턴, 색상, 질감 및 필요시 상징시설물 설치	∙서울로 2단계 연결길 중 중림2길 특성화 ∙도로 포장 및 정비 ∙포장 패턴, 색상, 질감 및 필요시 상징시설물 설치	변경없음
과업기간	`19.12.05.~`20.03.03. (3개월)	`19.12.05.~`20.05.03. (5개월)	기간증가
계약금액	15,670천원	15,670천원	변경없음

□ 변경사유

○ 중림2길 마중마당 조성에 대한 주민 민원 의견 수용에 따른 기간 연장 필요

○ 서울로7017과 중림2길 이외의 다른 2단계 연결길과의 조화를 위한 기존 설계 디자인 추가 디벨롭 필요

○ 따라서, 과업기간을 5월까지 연장하여 내실있고 성과지향의 용역을 추진하고자 함.

□ 귀책사유 : 서울특별시

□ 지체상금 부과여부 : 미부과

Ⅲ		향후계획

□ ‘20. 3월     :  용역 변경계약 의뢰(→재무과).  끝.