문서번호	기반시설과-741
결재일자	2020.3.6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	기반시설과장	시설부장	한강사업본부장
임영준	라철흠	전영주	03/06 신용목
협 조
	총무과장		이상이
	문화홍보과장		김홍식
	수상기획과장		마창준
	주무관		윤정
	주무관		박관호

2020년 수경시설 운영계획 변경 보고

2020. 3.

서울시한강사업본부

시설부

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

2020년 수경시설 운영계획 변경 보고

코로나바이러스감염 확산 방지를 위하여 아래와 같이 2020년 한강공원 수경시설 운영계획을 변경하여 시행하고자 함

□ 관련근거

○ ‘20년 한강공원 수경시설 가동 및 유지관리 계획(기반시설과-128,2020.1.14)

- 수경시설 가동기간 : 2020.4.1. ~ 10.31(7개월)

□ 수경시설(분수) 현황

○ 분수현황: 6개 공원 12개 분수

○ 운영현황

- 가동기간 : `20. 4. 1. (수) ~ 10.31.(토) (7개월)

- 가동 개시일별 수경시설 현황

개 시 일	분 수 명
4.1.(수)	반포 달빛무지개분수, 여의도 물빛광장분수(2개소)
5.1.(금)	음악‧벽천‧조형물‧수상‧안개‧거울‧이촌 벽천분수(7개소)
7.4.(토)~ 8.29.(토)	뚝섬 물보라극장분수, 난지 물놀이장분수(2개소) ※ 난지 물놀이장 분수는 물놀이장 운영 일정에 맞추어 조정

- 가동시간 : 일 평균 5회～10회(10:00~22:00), 1회당 20~30분 연출

□ 현안사항

○ 분수 등 수경시설은 한강공원 이용객의 운집 유발요인이 되고 있으므로 바이러스 확산 예방을 위하여 4월 예정인 가동개시일 조정 필요

- 수경시설은 신체가 물과 접촉하는 시설로써 수질오염 등에 따른 감염 예방도 필요할 것으로 판단됨

- ’19년 4월 반포 및 여의도공원 시민이용 현황          (단위:천명)

합 계	반 포	여의도	비 고
6,843	783	6,060	새빛섬 216만명/연

○ 반포 달빛무지개 분수의 통신시설 개선공사 등의 원활한 시행을 위해 안정적인 공사기간 확보 필요(3~4월)

- 달빛무지개분수 통신공사 및 여의도물빛광장 샤프노즐 개선공사 시행

(4월 완료 예정)

□ 조치의견

○ 반포달빛무지개․여의도물빛광장 분수 가동시점 연기 : 4.1일 → 5.1일

- 7개분수가 가동을 시작하는 5월에 맞춰 가동

※ 4월중 바이러스 감염 확산 상황에 따라 변경 가능

○ 가동 연기 기간동안 반포 달빛무지개분수 등 개선공사 실시

- 4월중 달빛무지개분수 통신 및 여의도물빛광장 노즐 개선공사 완료하여 안정적 운영을 통한 대민서비스 제고

○ 홈페이지 및 현장 안내판 게시를 통한 가동연기 사전 홍보

(******시설명) 가동연기 안내

2020년 2월 23일부로 코로나19 대응을 위한 위기경보가 ‘심각단계’로 격상됨에 따라 바이러스 확산 방지를 위하여 (******시설명)를 아래와 같이 가동 연기합니다.

시민 여러분의 안전을 위해 적극 협조를 바랍니다.

(당초) 2020. 4. 1. → (변경) 2020. 5.1

서울특별시 한강사업본부장

붙임 : 2020년 한강공원 수경시설 가동 및 유지관리 계획1부.  끝.