“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경 시행(우면산가압장 급수체계 개선공사)

1. 우리본부에서 시행중인 “우면산가압장 급수체계 개선공사”에 대하여 아래와 같이 설계변경(총차분 3회, 4차분 1회)을 시행코자 합니다.

가. 공사현황

1) 공 사 명 : 우면산가압장 급수체계 개선공사

2) 공사개요 : 양재아리수올림터 설치 Q=209천㎥/일, 송수펌프 : 7대,

송배수관 D1,200~1,500㎜ L=535m

3) 공사기간

․ 총차분 : 2017. 12. 13.~2020. 5. 30.

․ 3차분 : 2020. 1. 1.~2020. 5. 30.

4) 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비 및 부대비(시설비)

5) 계 약 자 : 국정종합건설㈜ 외 1개사

나. 설계변경 현황 및 사유

1) 설계변경 금액

․ 총차분(3회 설계변경)

(단위 : 원)

****	****	****	***********	***
*****	*************	*************	****************
*****	*************	*************	**
****	*************	*************	****************

․ 4차분(1회 설계변경)

(단위 : 원)

****	****	****	***********	***
*****	*************	*************	****************
*****	**********	**********	**
****	*************	*************	****************

2) 계약기간 : 변경없음

3) 변경사유

- 흡수정 내부 구조체 및 신축이음부 보수 등 신공종 발생 및 물량 증감

붙임 :  1. 설계변경 도서제출 공문(건설사업관리단) 1부.

2. 설계변경 내역서(총차분 3회) 1부.

3. 설계변경 내역서(4차분 1회) 1부.

4. 계약금액 조정 검증 확인서 1부.

5. 합의서 1부.  끝.

주무관	김형식		시설과장	송병욱		시설안전부장	신용철		상수도사업본부부본부장	03/06 구아미
협조자	주무관	박건수		시설팀장	최이영		주무관	이효원
예산팀장	홍경숙
시행	시설과-2890	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51(합동 27-1)	/
전화	02-3146-1491	/전송	02-3146-1429	/	see1997@seoul.go.kr	/	부분공개(5)