문서번호	지역돌봄복지과-4119
결재일자	2020.3.6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	복지시설팀장	지역돌봄복지과장
박슬기	서해경	03/06 하영태

종합사회복지관 기능보강사업 계획변경 지원계획(번동5단지)

2020. 3

복 지 정 책 실

(지역돌봄복지과)

기능보강사업 변경 계획(안) [번동5단지]

2019년 기능보강사업 예산으로 집행 중인 번동5단지종합사회복지관 계획변경 요청에 따라 검토하고 그 결과를 보고드림

□ 요청사항

❍ 2019년 종합사회복지관 기능보강사업 계획 변경 신청

(강북구 복지정책과-5147 / 2020.2.26.)

❍ 시 설 명 : 번동5단지종합사회복지관

❍ 사 업 명 : 스프링클러 공사

❍ 요청내용 : 공사 진행 중 현장여건에 따른 공사의 추가 및 변경· 내진설비공사(추가)를 위한 낙찰차액 사용 승인

□ 사업변경 신청사항

❍ 변경 사유

① **********************************************************************************************

- 1층 기존 타일면이 탈락 및 틀어짐으로 인해 철거 후 재설치 필요

- 알람밸브실 벽체공간 부족으로 경량벽으로 변경(당초 조적벽)

- 3층 강당 기존 흡음벽 일부 구조안전성을 위해 재설치 필요(당초 공사범위 미포함)

- 기타 현장여건 반영한 계획 변경

· 스텐레스핸드레일을 스탠드형으로 변경(당초 벽부형)

· 1층 커텐박스 재사용으로 물량 감소

② ******************************************************************************************************

- 소방 내진설계 누락시 소방시설 완공검사증명서 발급이 불가하다는  강북소방서측의 행위허가 관련 통보에 따라 기존 소방 시설 설치 내역에 내진설비공사 추가

□ 검토결과 : “승인”

❍ 승인내역 및 검토의견(서울시 복지재단 타당성 검토 반영)

① 건축분야 당초 대비 계획변경에 따른 낙찰차액 사용 승인

- ***************************************************************************************************************

② 소방시설분야 내진설비공사 추가에 따른 낙찰차액 사용 승인

- ********************************************************************************************************

- *******************************************************************************************

*소방시설 내진설계란 건축물 내부에 설치되는 설비이므로 지진 시 건축물로 부터 전달되는 지진영향력이 소방시설에 최소한으로 미칠 수 있도록 건축물과 소방시설과의 연결구조에 대한 설계

□ 기능보강사업 변경 대비표

❍ 변경 대비표

(단위 : 천원)

사업명	기 존			변 경 후		증 감 (계약액 대비)
	예산액		계약액
스프링클러 공사 (시:구=7:3)	시비	*******	*******	시비	*******	****** (낙찰차액 활용)
	구비	*******	******	구비	*******
	합계	*******	*******	합계	*******

❍ 변경 세부내역

(단위 : 천원)

사업명	공 사 내 역	예 산 내 역					비고
		계		시 비	구 비
스프링클러 공사	********	*******	*******			******	계약액
	***** ************	*****	*****			*****	낙찰차액 활용사업
	******* ********	******	*****			*****	낙찰차액 활용사업
	**	*******	*******			*******

붙 임 : 1. 자치구(강북구) 사업변경 승인요청 공문 1부.

2. 기능보강 사업변경을 위한 검토자료 일체.

3. 서울시 복지재단 타당성 검토 의견서 1부.