문서번호	기획예산과-582
결재일자	2020.3.10.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	기획예산과장	총무부장		한강사업본부장
이경춘	문영일	기봉호		03/10 신용목
협 조

한강사업본부 주요사업 공정관리 계획

2020. 3

한강사업본부

(기획예산과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

한강사업본부 주요사업 공정관리 계획

’20년 본부에서 추진중인 신속집행 대상 사업 및 주요사업에 대한 공정관리로 사업추진에 만전을 기하고자 함

□ 공정관리 개요

○ 신속집행 대상(市 기준)   : 40개 단위사업, 74,900백만원

- 시설비, 자산및물품취득비, 민간위탁금 등 재정 조기투입으로 경제활력 제고

○ 공정관리 대상(본부 기준) : 42개 세부사업, 60,158백만원

- 시설비 5억원 이상 사업을 대상으로 신속집행을 위한 공정관리 실시

※ 선정기준

- 市 기준 신속집행 대상 단위사업의 경우 다양한 사업 혼재로 세부사업을 기준으로 공정관리 대상 선정

‣ 한강공원이용시설 유지관리 단위사업의 경우 운동시설‧놀이터 설치(공원부), 안내표지판 유지보수(시설부), 안내판 일제정비(총무부) 등 세부사업 혼재

- 市 신속집행 대상 40개 단위사업중 시설비 5억원 이상인 34개 세부사업, 57,551백만원 선정

‣ 한강숲, 자연형 호안 복원, 수상레포츠 통합센터 조성, 난지캠핑장 리모델링 등

- 34개 세부사업 외 신년업무에 포함된 주요사업 8개, 2,607백만원

‣ 지역성 회복, 한강 접근체계 개선, 한강변 보행네트워크 조성, 보행환경 전수조사 및 무장애 구간 조성, 한강몽땅축제, 스마트 관리시스템, 자연형 모래사장 조성, 안내표지 개선

○ 주요 보고사항

- 사업추진 로드맵, 사업개요, 신속집행 계획, 그간 추진실적, 향후계획 등

□ 향후 일정

○ 공정관리 사업별 상세 추진계획 1차 보고 : ’20. 3월중

○ 매월 말 사업별 추진현황 보고            : ’20. 4. ~ 5.

붙임 : 공정관리 대상사업 목록 및 보고(작성) 서식 각 1부.

붙임 1. 공정관리 대상 목록

○ 신속집행 대상 : 34개 사업, 57,551백만원 (시설비 5억원 이상)

연번	단위사업명	세부사업	예산액(원)
1	한강공원 나들목 증설 및 개선	광진교 남단	1,800,000,000
2	“	망원 나들목	1,600,000,000
3	“	나들목 증설, 개선 기본설계	700,000,000
4	한강 관공선 등 운영 및 관리	관공선, 홍보선 안전검사 수리	640,000,000
5	한강공원 이용시설 유지관리	운동편의시설 확충정비	980,000,000
6	한강저수로 정비	준설 및 준설토 반출	1,800,000,000
7	한강공원 직영 체육시설 유지관리	한강둔치 족구장 건립	600,000,000
8	둔치 및 화장실 청소	이동형 화장실 제작 설치	2,722,000,000
9	한강공원 수영장 유지관리	수영장 유지보수(토목)	1,359,000,000
10	“	노후 수도배관 교체	3,797,000,000
11	“	수영장 유지보수(기전)	745,000,000
12	“	강수욕장 조성 기본설계 용역	500,000,000
13	녹지시설 유지관리	호안녹지 유지관리	660,000,000
14	생태공원 운영 및 유지관리	생태공원 탐방로 등 시설개선	570,000,000
15	한강공원 접근시설 유지관리	나들목 및 제방 유지관리	1,500,000,000
16	“	정밀안전진단 및 정밀점검	568,000,000
17	“	교량 연결승강기 설치	3,000,000,000
18	한강공원 하천시설 유지관리 및 개선	노후 보행로 개선	750,000,000
19	자전거도로 유지보수	보행자 분리 등 안전시설 개선	960,000,000
20	“	태양광 표지병 설치	600,000,000
21	한강공원 기전시설 유지관리	수경시설 유지보수 공사	600,000,000
22	“	달빛무지개분수 유지보수	550,000,000
23	“	한강 수상갤러리 조성	850,000,000
24	“	달빛무지개분수 노후시설 개선	1,600,000,000
25	한강공원 매점 유지관리	매점 신설 및 부력체 보수 등	2,246,000,000
26	한강숲 조성	한강숲 조성	6,000,000,000
27	노후상수관 정비	노후 상수도관 교체공사	1,700,000,000
28	새남터 이촌2동 보행육교 개선	새남터 이촌2동 보행육교 개선	1,300,000,000
29	한강공원 난지캠핑장 리모델링	한강공원 난지캠핑장 리모델링	3,591,000,000
30	선유도 보행잔교 조성	선유도 보행잔교 조성	1,000,000,000
31	암사초록길 조성	암사초록길 조성	3,300,000,000
32	자연(형) 호안 복원	자연(형) 호안 복원	3,605,000,000
33	옥수역 하부 한강변 휴식공간 조성	옥수역 하부 한강변 휴식공간 조성	1,395,000,000
34	수상레포츠 통합센터 조성	수상레포츠 통합센터 조성	3,963,500,000

○ 주요사업 : 8개 사업, 2,607백만원 (신속집행 대상 사업 외 주요사업)

연번	사업명	예산액(원)	비고
1	지역성 회복	300,000,000
2	한강 접근체계 개선	400,000,000
3	한강변 보행네트워크 조성	-	도시공간개선단 예산
4	보행환경 전수조사 및 무장애 구간 조성	-
5	한강몽땅 축제	1,287,000,000
6	스마트 관리시스템 구축	300,000,000
7	자연형 모래사장 조성	250,000,000
8	한강공원 안내표지 개선 및 정비	70,000,000

붙임 2. 보고(작성)서식

0		사 업 명	정상추진	지연	보류 등
			○

총괄부서	00부장 : 000 ☎ 3780-0000 0000과장 : 000 ☎ 0000 담당 : 000 ☎ 0000

총사업비	000백만원	추진구분	신규/계속	완료시기	’00.0	재원구분	국비/시비

<사업추진 로드맵>

시 기	목 표	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
’20
’21

□ 사업개요

○ 대    상 :

○ 사업기간 :

○ 사업내용

-

‣

-

○ 소요예산 :

□ 예산 조기집행 계획 (신속집행대상액 :     백만원)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	3분기	4분기
집행액
내 용

※ ’20년 상반기중 신속집행이 최대한 가능하도록 작성하며, 불가시 사유기재

□ 그간 추진실적 (현 공정율 00%, ’20.0월 준공)

(※20.3.10기준)

○

-

○

-

-

○

○

□ 현안사항 및 대응방안 (※신속집행 및 사업추진에 따른 쟁점과 대책 위주 작성)

○

-

‣

○

□ 향후일정

○

-

○

○

※ 연차별 투자수요 (※장기계속사업일 경우 작성)

(단위 : 백만원)

단위사업	구분	계	기투자	’20	’21	’22
계	계
<사업명>	국비
	시비
	민간
	기타