문서번호	건축부-4150
결재일자	2020.3.6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		건축관리과장	건축부장
서경식		차무흥	03/06 임인구
협조
	주무관		김민희

『스페이스 살림 조성공사 건설사업관리용역』

물가변동으로 인한 계약금액 조정 검토보고

2020. 3.

도시기반시설본부

(건 축 부)

『스페이스 살림 조성공사 건설사업관리용역』

물가변동으로 인한 계약금액 조정 검토보고

지방계약법령 및 용역계약 일반조건에 따라 계약상대자(건설사업관리용역업체)로부터 물가변동에 의한 계약금액 조정 신청이 있어, 이를 검토하고 그 결과를 보고함

※ 금회 반영 금액 : 증 34백만원

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 스페이스 살림 조성공사 건설사업관리용역

○ 용역기간 : 2017.9.25. ~ 2020.7.24.

○ 용역업체 : 주식회사 희림종합건축사사무소 외 1개사

○ 용 역 비 : ********************

○ 차수별 계약현황

구 분	용역 금액(원)	용역 기간	비고
총차	*************	**********************
1차	***********	**********************	용역 완료
2차	***********	**********************	용역 완료
3차	***********	**********************	진행중
4차	***********	**********************	미계약

□ 계약금액 조정사유 및 근거

○ 조정 사유 : 물가변동으로 인한 계약금액 조정

○ 관련 근거

- 지방계약법 제22조, 같은 법 시행령 제73조 및 같은 법 시행규칙 제72조

- 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(행정안전부 예규 제21호, ‘18.1.10.) 제14장 용역계약 일반조건 제6절 제2호 물가변동으로 인한 계약금액 조정

- 『국토교통부 고시 제2017-414호(‘17.6.20.)』에 의한 건설기술용역대가 등에 관한 제3장 건설사업관리 대가기준 제7조(대가의 조정)

○ 보고 현황 (계약상대자 → 우리본부)

-「물가변동보고서(2회) 제출」HAP 20-0227-0429호(‘20. 2. 27.)

□ 계약금액 조정 요건 검토

○ 조정 요건 : 기간요건, 변동요건 및 절차상 요건이 모두 충족되어야 함.

- 기 간 요 건 : 계약체결일로부터 90일 경과

- 변 동 요 건 : 입찰일을 기준으로 품목조정률이 100분 3(3.0%) 이상 증감

- 절차상 요건 : 계약상대자의 조정 청구

○ 조정 시기

- *********************************************************************

- **********************************

- **********************************************************************

○ 검토 결과(1회, 기반영 완료함)

***************************

***************************

- **********************************

- **************************

- ***********************************************

○ 검토 결과(2회, 금회 반영)

*****************************

***************************

- **********************************

- **************************

- *************************************************액

○ 예산 관련

- ***************************************

- 예산과목 : 양성평등 및 여성복지 증진, 여성경제력 강화, 스페이스 살림 건립추진, 감리비

□ 계약금액 조정 내역

○ 계약금액 조정보고서 작성 : *********

○ 1회 조정내역 (기 반영 완료)

구 분	금 액	비 고
계약금액(총차)(A)	**************
적용제외대가(B) (조정기준일 이전 배치분, 기성청구금)	************	************ ******************
적용대가(C=A-B)	**************
품목조정율	*****
조정금액(D)=(C×4.43%)	************	*******
손해배상보험료 증가금액(E)	*********	**************************
변경후 계약금액(총차) (F)=(A+D+E)	**************	*************

○ 2회 조정내역 (금회 반영)

구 분	금 액	비 고
계약금액(총차)(A)	**************
적용제외대가(B) (조정기준일 이전 배치분, 기성청구금)	**************	*************** ****************** ************** ****************** **************
적용대가(C=A-B)	************
품목조정율	*****
조정금액(D)=(C×5.65%)	************	*******
변경후 계약금액(총차) (E)=(A+D)	**************	**************

□ 처리의견

○ *************************************************************************************.

(단위 : 천원)

구 분		당 초	변 경	증 감	비고
계약 금액	총차	*********	*********	********	변경계약
	3 차	*******	*******	********	〃
	4 차	*******	*******	********	3월말 계약 예정

붙임  물가변동 보고서 및 관련자료 1부.  끝.