문서번호	시설개선과-2204
결재일자	2020.3.11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설개선과장
임신택		03/11 윤정한
협 조
	주무관			代윤용호
	주무관			황미령

- 2020년 잠실야구장 환경개선공사 -

시공사 실정보고 및 제경비 정산 등 설계변경 검토 보고

2020. 3.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

- 2020년 잠실야구장 환경개선공사 -

시공사 실정보고 및 제경비 정산 등 설계변경 검토 보고

『2020년 잠실야구장 환경개선공사』와 관련하여 시공사 실정보고 및 제경비 정산 등에 대한 검토 보고임

공사개요

○ 공 사 명 : 2020년 잠실야구장 환경개선공사

○ 공사개요

- 내야 관람석(블루) 등·좌판 교체 730석

- 기존 외야 관람석(폭 420mm) 철거 5,833석, 신규 관람석(폭 465mm, 500mm) 설치 5,753석

- 외야 관람석 바닥 정비 및 방수 4,244㎡

- 피칭장(불펜) 환경개선(휀스, 안전가드 교체 등)

- 기존 안전난간 철거 및 강화유리안전난간(관급공사) 설치 220m 등

○ 사 업 비 : ***************

- *********************

- **************************************

○ 공사기간 : 2020. 01. 23. ~ 03. 14.

○ 시 공 사 : ************

○ 추진경위

- 2020. 01. 07    공사발주

- 2020. 01. 16    공사계약

- 2020. 01. 23    착공

시공사 실정보고(2차)에 따른 검토

○ 관람석 수량 최종 변경

- 외야관람석 의자배열 확정에 따라 제1회 설계변경 검토 보고 당시보다 57석 증가 (최종수량 5,753석, 465mm 4,139석, 500mm 1,614석)

※외야관람석 기존 5,833석에서 신규 5,753석으로 80석 감소

****************

○ 투수피칭장(불펜) 안전가드 설치 규격 변경

- 안전가드 두께를 당초 50mm로 설계하였으나, 두께가 과다하여 휀스와의 부착성 및 외관의 미려함이 떨어질 우려가 있어, 주변 덕아웃 안전가드 두께와 동일한 30mm로 변경 설치

****************

제경비 정산 검토

○ 제경비 항목 최종 정산

- 퇴직공제부금비 정산 ************

・실제 납입 금액만큼 정산

- 산업안전보건관리비 정산 **************

・산업안전보건법에 의한 적정 사용금액 확인

- 위 공사비 변경에 따른 일반관리비 및 이윤 등 감액

계약금액 조정

○ 공사비 증․감 내역

(단위:원)

구 분		당 초	제1회 설계변경 검토보고 당시	최종변경 후	증 · 감 (당초대비)
총공사비		*************	*************	*************	************
도급비	공급 가액	*************	*************	*************	************
	부가 가치세	***********	***********	***********	************
	계	*************	*************	*************	************
관급자재비		**********	***********	***********	************

조치의견

○ 위와 같이 최종 설계변경(제경비 정산 포함)을 실시하고자 함.

붙임  1. 시공사 실정보고서 1부.

2. 설계변경내역서 및 수량산출서 각 1부.

3. 제경비정산 관련 서류 각 1부.

4. 계약금액조정검증확인서 1부.

5. 산업안전보건관리비 정산검토결과서 1부.

6. 합의서 1부.

7. 제1회설계변경 검토보고서 및 설계변경내역서 각 1부.  끝.