문서번호	교량안전과-3908
결재일자	2020.3.11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	교량관리팀장	교량안전과장
신익현	강천수	03/11 하현석

- 2020 한강교량 일상유지보수공사(2공구) -

제2차 작업지시 기한연기 검토보고

2020. 3월

안 전 총 괄 실

(교량안전과)

- 2020 한강교량 일상유지보수공사(2공구) -

제2차 작업지시 완료기한 변경 검토보고

한강교량 건설사업관리단 시설 보수를 위한 작업을 시행중 선행 공종의 일정 지연 등에 따른 작업기한 연기를 검토하여 보고 드림.

※ 관련근거 : 한강교량감 2020-38호(2020.3.10), 한강 2020-309호(2020.3.9.)

<작업현황>

￭ 지시번호 : 2020-제2차(마포대교, 동작대교)

￭ 작업기간 : 2020. 2. 10 ~ 2020. 3. 15

￭ 작업현황

공 종	수 량	작업결과	비 고
현장사무실 설치	3EA	설치완료
가설건축물 철거 및 정비	345.6㎡	철거 작업중	2020.3.9. ～ 3.20

□ 연기사유

○ 기존시설을 사용중인 사무실 이설지연 및 우천 등으로 인한 인입시설(전기, 통신) 정비 순연으로 인한 공정 지연으로 철거시 발생 폐기물의 분리, 선별 처리 공기부족

- 폐기물관리법 제13조에 따른 폐기물 선별처리(가설건축물 철거 잔재)

□ 건설사업관리단 검토결과

○ 발생 폐기물의 적정한 처리를 위해 작업기한 연기 필요

- 폐기물 선별기준 : 재활용 가능자재 및 일반, 특정 폐기물(소요기간 10일)

○ 변경내용

구 분	공 종	작업수량		작 업 기 간
		당초	변경	당초	변경
제2차	가설건축물 철거 및 정비	345.6㎡	345.6㎡	2020. 2. 10.～3. 15	2020. 2. 10.～3. 27

○ 귀책사유 : 발주처(절대공기 부족)

□ 조치의견 및 계획

○ 상기 건설사업관리단의 검토결과와 같이 작업기간 변경이 타당하므로 승인토록하여 보수공사를 완료하고 추후 설계 변경시 정산 반영토록 조치하고자 함.

붙임 : 건설사업관리단 작업기한 연기요청 검토보고 1부. 끝.