문서번호	전환도시담당관-2546
결재일자	2020.3.11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	전환도시사업팀장	전환도시담당관
지은영	성수미	03/11 최현정

「도봉 도시전환 제작 실험실」설계용역 추진계획

2020. 3.

전환도시담당관

「도봉 도시전환 제작 실험실」설계용역 추진계획

시민 주도 제작 실험 및 지역사회 문제 해결을 위한「도봉 도시전환 제작 실험실」의 설계용역을 추진하고자 함

Ⅰ		추진근거

○ 도시전환 제작 실험실 조성 사업 계획(안)(전환도시담당관-2521, ’19.10.17.)

○ 지속가능하고 회복력 있는 전환 도시 서울 추진 계획(전환도시담당관-2562, ’19.10.18.)

○「도봉 도시전환 제작 실험실」조성·운영계획(전환도시담당관-2036, ’20.2.27.)

Ⅱ		건축현황

○ 위    치: 서울시 도봉구 창동 3 (부지면적 1,467㎡, ‘무중력지대 도봉’ 야외부지)

○ 지역·지구: 도시지역(일반상업지역)

○ 공사종별: 신축(일반건축물)

○ 규    모: 연면적 222㎡, 지상 2층  ※ 규모는 사업추진과정에서 조정 또는 변경될 수 있음

○ 용    도: 제2종 근린생활시설

○ 위치도 및 현장사진

위치도 (4호선 창동역 1번출구)	현장사진(지목: 대지)

Ⅲ		세부 추진계획

□ 사업개요

○ 사 업 명:「도봉 도시전환 제작 실험실」신축 공사 설계용역

*****************************

*********************

***********************************************

*****************************************

	*********************************
**************************************************************************************************** ************************** ************************************************************************************ ************************************ **************************************************************************************************************************************** ***************************************************************************************************************** ************************************************************

***************************

－  예산과목: 서울혁신기획관, 전환도시담당관, 도시전환을 통한 지속가능한 서울 구현, 전환도시 서울 조성, 지속가능한 도시전환랩 조성 및 운영, 시설비(100-401)

□ 과업내용

○ 기본 및 실시설계

－  건축, 기계, 전기, 통신 등 신축에 필요한 일체 설계자료 작성

○ 소요 공사비 및 공사기간 산정

○ 투시도 모델 제시

○ 인·허가 사항 타 기관 협의(건축허가, 착공신고, 준공신고 등)

○ 세부 공사시행에 대한 자문

○ 기타 발주기관이 정하는 사항

Ⅳ		향후일정

○ 수의계약 체결(재무과)                               :  2020. 3.

○ 설계용역 착수보고(계약일로부터 10일 이내)          :  2020. 3.

○ 설계용역 중간보고(계약일로부터 40일 이내)          :  2020. 4.

○ 설계용역 최종보고(준공예정일 10일 이전)            :  2020. 5.

○ 설계용역 준공                                        :  2020. 6.

붙임  1. 설계용역비 산출내역서 1부.

2. 과업내용서 1부.  끝.