문서번호	교량안전과-4028
결재일자	2020.3.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	강구조교량팀장	교량안전과장	안전총괄관
이제택	박찬규	하현석	03/12 김홍길
협 조

‘20년 영동대교보수공사 추진계획

2020. 3.

안전총괄실

(교량안전과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

‘20년 영동대교보수공사 추진계획

‘20년 영동대교보수공사 추진계획을 수립, 사업추진에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		시설물 현황

□ 교량현황

구 분	구조형식	연 장(m)	폭(m)	설계하중	준공년도
본 교	SPG	850.0	25.0	DB-18	1973
북단접속교	PSC+SPG	167.0	25.0~34.0	DB-18	1973, 2007
A램프	STB	110.0	5.7	DB-24	1987
B램프	STB	121.72	5.7	DB-24	1987
E램프	STB	171.7	6.25	DB-24	1995, 2007
F램프	STB	166.5	6.25	DB-24	1995, 2007
G램프	SPG+STB	306.0	6.5	DB-24	1987
H램프	STB+SPG	290.0	6.5	DB-24	1987
I램프	STB	300.0	6.5	DB-24	1997
자전거연결로	SPG	156.5	3.0	-	2007

□ 위치도 및 현황사진

(위치도)	(전경 사진)

Ⅱ		주요 보수 대상

**************************************************

*********************************************************

************************************************

**********************************************

○ 교면포장 : 2006년 교면포장 보수구간은 노후화되어 재포장 필요(76.5a)

○ 신축이음부 : 유간부 토사퇴적, 후타재 손상 및 마모, 누수 등이 발생.

○ 연석부 : 균열(0.3mm 이상) 박리 및 박락(들뜸) 등의 손상 발생.

○ 강재거더 : 신축이음 하부 누수로 도장손상 및 일부 부식

****************************************************************

○ 기타 개략공사비 산출내역

Ⅲ		보수·보강공사 추진 계획

□ 추진방향

■ 시설물 내구성 유지를 위한 보수공사 적기 시행

○ 2018년 정밀안전진단결과 발견된 손상에 대하여 적기에 보수하여

시설물의 안전성 및 내구성 확보

■ 실시설계 용역 시행 후 공사발주 시행

○ 실시설계

▪영동대교는 준공 후 47년이 경과된 노후시설물로 바닥판이 열화되어

일부 구간에서 균열 및 백태 등으로 치환보수가 필요한 상태임에 따라

대안공법 및 거더보강, 하상구간 교각보수를 위한 대안공법(보강 또는 보수)

및 작업공간 관련 구조계산 등으로 직접설계가 어려운 실정으로 실시설계

용역 시행 후 공사발주

***********

**************************************************************

***************************************************

*************************************************

************************************************

******************************

□ 사업개요

□ 영동대교보수공사(장기계속)

○ 공 사 명 : 2020년 영동대교 보수공사(장기계속)

○ 총공사비 : *********************************

구 분	합 계	2020년	2021년	비 고
****	*****	*****	*****
***	*****	*****	*****
***	***	***
***	**	**

○ 공사기간 : 2020.07 ~ 2021.12

○ 안전점검 이력

구 분	주요 점검결과	비 고
******************* ******************* *******************	*********************** ************************************************************************************* ******************************************* ********************** ***************************************

□ 추진계획

□ 실시설계용역 발주(2020년 3월)

○ ****************

○ 용역기간 : 착수일부터 90일

******************

*************************************

**********************************************************

****************************************

********************************

*********************************************************

****************************************

************************************************

○ 입찰방법

- 제한경쟁입찰(지역제한 및 자격제한)

· 입찰공고일 전일부터 입찰일까지 주된 영업소가 서울특별시에 소재한 업체

※ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제4장(제한입찰운영) : 지역제한(추정가 2억 미만)

· 엔지니어링산업진흥법에 의거 건설부문 구조분야의 엔지니어링사업자 신고를 필한자

또는 기술사법령에 의거 건설부문 구조분야의 기술사 사무소 개설 등록을 필한자

Ⅳ		향 후 계 획

□ ‘20. 03. ~ ‘20. 06.  실시설계 및 설계감리용역 시행

□ ‘20. 07. ~ ‘21. 12.  보수공사 시행(장기계속)

붙 임 : 1. 세부 추진계획 1부.

2. 관련 보고서 1부. 끝.