문서번호	시설개선과-2291
결재일자	2020.3.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설개선과장	체육시설관리사업소장
유정하		윤정한	03/12 김정열
협 조
	주무관			진종구

잠실주경기장 노후 전기설비 교체공사 추진계획

2020. 3.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

잠실주경기장 노후 전기설비 교체공사 추진계획

잠실주경기장 노후 배전설비 및 전력간선을 교체하여 전기안전사고를 예방하고 각종 행사추진에 철저를 기함.

1		추진근거

□ 2020년 업무계획 – 잠실운동장·구의야구공원 예산사업(시설비)

2		추진계획

□ 사업개요

❍ 사 업 명 : 잠실주경기장 노후 전기설비 교체공사

❍ 사업기간 : 2020. 3. ~ 6.

*************

*******************************

**********************************

**************

**********************************

*************************************************         ***********************************************

****************************************************

********************

***************************************************

**************************************

*****************************

****************************************************

******************************************

- 예산과목 : 시민체육시설 운영 및 관리, 노후체육시설 개보수 사업, 잠실종합운동장·                    구의야구공원 시설 개·보수 시설비및부대비, 시설비

□ 시행방법

구 분		사업내용	사업비 (천원)	발주방법
공사	전기공사	****************	*******	**** ****
	관급자재 ************	******************* ********************	*******	**** ****
용역	감 리	************	******	****
기 타 (이전비 등)		************* **************	******	******* ********
합 계			*******

※ 공사 발주전 설계금액으로 계약심사, 기술용역타당성심사 등 사전절차 이행으로 공사비 간   조정 될 수 있음

3		추진일정

□ 설계용역 준공          : 2020. 3. 12.

□ 특정제품 선정심의     : 2020. 3. 18.

□ 계약심사 의뢰         : 2020. 3. 19.

□ 공사 및 감리용역 발주 : 2020. 3. 25.

□ 관급자재 발주          : 2020. 3. 25.

□ 공사 착·준공          : 2020. 4. 10. ~ 6. 20.

붙임  1. 공사 설계내역서(도급, 관급자재) 1부

2. 감리용역 설계내역서 1부.  끝.