문서번호	교량안전과-4000
결재일자	2020.3.12.
공개여부	부분공개(5 6)
방침번호

			시 민
주무관		강남일반교량팀장	교량안전과장
이회진		조성만	03/12 하현석
협조
	강구조교량팀장		박찬규

-‘20년 시설물 보수.보강공사 실시설계 - 건설사업관리(설계감리)용역 시행계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 3

안전총괄실

(교량안전과)

-‘20년 시설물 보수공사 실시설계 -

건설사업관리(설계감리)용역 시행계획

2020년 시설물 보수공사 실시설계 대상사업에 대하여 건설사업관리(설계감리)용역을 시행하여 내실있는 설계품질을 확보하고자 함

⇒ 건설사업관리(설계감리) 용역 : 보라매고가 내진보강공사외 1건

⇒ 용역비 : 60,544천원(※ 추정 공사비 : 7,018,000천원)

Ⅰ		관 련 근 거

□ 건설기술진흥법 제39조(건설사업관리 등의 시행) 및 같은법    시행령 제57조(건설사업관리 대상 설계용역)

- 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제7조제1호 및        제2호에 따른 1종시설물 및 2종시설물 건설공사의 기본설계        및 실시설계용역

Ⅱ		추 진 현 황

□ ‘19. 7. 25. 건설사업관리(설계감리)용역 시행계획 수립

○ 용역품질 확보와 효율적인 관리, 감독을 위해 2개 용역으로 분리 시행

연 번	용 역 명	용역비 (천원)	담당팀
합 계		115,555
1	동작대교 보수공사외 2개소 실시설계 건설사업관리(설계감리) 용역	60,544	강남일반교량팀
2	영동대교 보수공사외 1개소 실시설계 건설사업관리(설계감리) 용역	55,011	강구조교량팀

□ ‘19. 7. 26. 기술용역 타당성심사 요청

□ ‘19. 8. 01. 기술용역 타당성심사 결과 통보 ⇒ 적정

Ⅲ		실시설계용역 발주 계획

○ 동작대교, 이수고가, 천호대교는 자체설계로 변경하여 제외

- 실시설계 대상공사 : 당초 5건 ⇒ 변경 2건

○ 보라매고가 내진보강공사 및 영동대교 보수공사 실시설계 추진

연 번	공사명	총공사비 (백만원)	주요공종	실시설계비 (백만원)	담당자
합 계		7,018		304
1	보라매고가 내진보강공사	3,900	- 받침교체 68개소 - 기둥보강 228개소 등	142	강남일반교량팀 이 재 우
2	영동대교 보수공사	3,118	- 콘크리트 바닥판 보수 2,700㎡ - 바닥판 철거 재시공 40㎡ 등	162	강구조교량팀 이 제 택

Ⅳ		건설사업관리용역 발주 계획

□ 용 역 명 : 보라매고가 내진성능평가 및 내진보강공사외 1개소 실시설계 건설

사업관리(설계감리) 용역

□ 대상시설 : 보라매고가, 영동대교

□ 용역기간 : 착수일로부터 3개월 ※실시설계 기간과 연계 추진

□ 총용역비 : 60,544천원

□ 계약방법 : 제한경쟁입찰(지역제한)

□ 입찰참가 자격

○ 서울특별시에 소재한 업체로 “가”와 “나”항의 자격을 모두 갖추어야 함

가. 입찰참가신청 마감일 현재 엔지니어링산업진흥법 제21조 및 동법 시행령 제         33조의 규정에 의거 건설부문 중 5개 전문분야(도로․공항, 교통, 구조, 토질·

지질, 조경)에 엔지니어링 사업자로 신고를 필한 업체 또는 기술사법 제6조

규정에 의하여 건설분야 5개 전문분야(도로․공항, 교통, 구조, 토질·지질,         조경)의  기술사사무소를 개설 등록한 업체

나. 건설기술진흥법 제26조에 따라 건설사업관리업무를 수행할 수 있는 건설기술

용역업[종합 또는 설계·사업관리 등의 전문분야]으로 시·도지사에게 등록된

업체

Ⅴ		향 후 계 획

□ ‘20. 3. ~ 4. : 용역 발주 및 계약

□ ‘20. 4. ~ 6. : 실시설계 과업기간과 연계하여 용역 시행

붙 임 : 1. 관련방침서 1부.

2. 용역발주 내역서 1부.

3. 과업내용서 1부. 끝

4. 기술용역타당성 심사결과 1부. 끝.