문서번호	시설보수과-2374
결재일자	2020.3.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
이평주		03/13 임영철
협 조
	주무관			김영봉
	주무관			김부호
	주무관			송일섭

함께 만드는 안전한 행복도시 서울

2020년 발주공사 건설사업관리계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 3.

동부도로사업소

(시설보수과)

2020년 발주공사 건설사업관리계획

건설기술진흥법 시행령 개정(‘19.7.1)에 따라 2020년 발주공사 건설사업관리방식 검토를 통해 시공단계 건설사업관리계획을 수립 보고함

Ⅰ		관련근거

건설기술진흥법 제39조의2, 시행령 제59조의 2, 시행규칙 제34조의2

기술심사담당관-4542(’20.3.1) : 시공단계의 건설사업관리계획 수립 및 제출 안내

Ⅱ		건설사업관리방식 검토

대상사업 : 총사업비 5억이상 토목공사(2억이상 전문공사)

(단위: 백만원)

연번	공 사 명	규모	공사기간	공사비	비고
1	도로시설물(터널,지하차도,복개) 일상유지보수공사	포장 73a, 표면보수 1,160㎡	‘20.3.~12.	852
2	교량시설물 일상유지보수공사	포장 150a, 단면보수 400㎡	‘20.3.~12.	1,450
3	성내유수지 보수공사	표면보수10,116㎡ 점검통로 250m	‘20.5.~10.	1,000
4	가락지하차도 보수공사	교면포장 5,400㎡	‘20.6.~10.	1,940

건설사업관리방식 검토

❍ 사업특성 및 발주청 역량 평가기준

- 평가배점 : 100점(공사특성 30, 사업여건 25, 공사수행방식 15, 발주청 역량 30)

- 평가점수에 따른 사업관리방식

‣50점미만 : 직접감독

‣65점미만 : 감독권한대행 등 건설사업관리 미적용

‣80점미만 : 감독권한대행 등 건설사업관리 적용가능

‣80점이상 : 감독권한대행 등 건설사업관리 적용

❍ 사업별 사업관리방식 검토결과

- 도로시설물(터널,지하차도,복개) 일상유지보수공사

‣평가점수 : 47점

‣발주청 가용인력 : 110인·월(산출 소요인력: 24.4인·월)

※ 소요인력 : 건설기술용역 대가 등에 관한 기준(국토부 고시 제414호, ‘17.6.20)

‣사업관리방식 : 직접감독

- 교량시설물 일상유지보수공사

‣평가점수 : 47점

‣발주청 가용인력 : 110인·월(산출 소요인력: 24.4인·월)

※ 소요인력 : 건설기술용역 대가 등에 관한 기준(국토부 고시 제414호, ‘17.6.20)

‣사업관리방식 : 직접감독

- 성내유수지 보수공사

‣평가점수 : 47점

‣발주청 가용인력 : 110인·월(산출 소요인력: 19.6인·월)

※ 소요인력 : 건설기술용역 대가 등에 관한 기준(국토부 고시 제414호, ‘17.6.20)

‣사업관리방식 : 직접감독

- 가락지하차도 보수공사

‣평가점수 : 47점

‣발주청 가용인력 : 110인·월(산출 소요인력: 19.5인·월)

※ 소요인력 : 건설기술용역 대가 등에 관한 기준(국토부 고시 제414호, ‘17.6.20)

‣사업관리방식 : 직접감독

Ⅲ		공사별 시공단계 건설사업관리계획

공사명 : 도로시설물(터널,지하차도,복개) 일상유지보수공사

❍ 사업관리방식 : 직접감독(감독자: 송일섭)

❍ 공사감독자 배치계획 : 24.4인·월

❍ 공사감독자 업무범위

- 공통업무

‣착수준비 및 건설사업관리 운영

‣최종 건설사업관리 보고

- 시공단계

‣공사 착수 및 시공계획 검토

‣사용자재 적정성 및 품질시험 성과검토

‣공정, 안전, 환경관리

‣설계변경 관리

‣기성 준공검사 관리

‣시공단계의 예산검증 및 지원

‣일반 행정업무

공사명 : 교량시설물 일상유지보수공사

❍ 사업관리방식 : 직접감독(감독자: 김부호)

❍ 공사감독자 배치계획 : 24.4인·월

❍ 공사감독자 업무범위

- 공통업무

‣착수준비 및 건설사업관리 운영

‣최종 건설사업관리 보고

- 시공단계

‣공사 착수 및 시공계획 검토

‣사용자재 적정성 및 품질시험 성과검토

‣공정, 안전, 환경관리

‣설계변경 관리

‣기성 준공검사 관리

‣시공단계의 예산검증 및 지원

‣일반 행정업무

공사명 : 성내유수지교 보수공사

❍ 사업관리방식 : 시설관리공단 감독위탁(공사관리관: 김부호)

❍ 공사감독자 배치계획 : 19.6인·월

❍ 공사감독자 업무범위

- 공통업무

‣공단 감독 위·수탁 관리업무

‣최종 건설사업관리 보고

- 시공단계

‣설계변경사항 검토

‣시공단계의 예산검증 및 지원

‣일반 행정업무

공사명 : 가락지하차도 보수공사

❍ 사업관리방식 : 시설관리공단 감독위탁(공사관리관: 김영봉)

❍ 공사감독자 배치계획 : 19.5인·월

❍ 공사감독자 업무범위

- 공통업무

‣공단 감독 위·수탁 관리업무

‣최종 건설사업관리 보고

- 시공단계

‣설계변경사항 검토

‣시공단계의 예산검증 및 지원

‣일반 행정업무

Ⅳ		행정사항

건설사업관리계획 제출(사업소→한국건설기술관리협회)

따로붙임  사업별 건설사업관리계획(발주청 역량평가 및 건설사업관리 업무 배치계획 포함) 4부.  끝.