문서번호	기전과-1564
결재일자	2020.3.13.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		기전과장	남부도로사업소장
정수영		임태수	03/13 변봉섭
협조
	주무관		김용문

2020년 제설장비 세척 및 보양작업 추진계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 3.

남부도로사업소

(기  전  과)

2020년 제설장비 세척 및 보양작업 추진계획

′19/20년 제설 작업기간이 마무리됨에 따라, 제설장비 세척 및 보양작업을 아래와 같이 시행하여 장비관리에 만전을 기하고자 함.

1		제설장비 현황

❍ 제설차량

계	덤프트럭		다목적트럭		비고
	8톤	15톤	8.5톤	12.6톤
7	3	2	1	1	- 다목적트럭 1대 염수전용

❍ 염화칼슘 살포기

계	염화칼슘살포기			비고
	대형(11㎥)	대형(9㎥)	대형(6㎥)
	15톤장착	15톤장착	8톤장착
15	10	1	4	9㎥ 1대는 예비용

❍ 제설삽날

계	제설삽날				비고
	8-15톤용	5톤용	2.5톤용	1톤용
21	14	1	5	1

❍ 제설장비 사진

덤프트럭+살포기(전면)	덤프트럭+살포기(후면)	제설삽날

2		작 업 개 요

❍ 작업기간 : 2020. 3. 16. ~ 4. 10.

- 살포기 탈착 및 세척 : 2020. 3. 16. ~ 3. 27.

․민영 제설장비(8대) : 제설기간 만료가 3월 15일(일요일)로 3월 16일(월요일) 탈착(주말 제설비상에 대비, 제설담당과 업무협의 완료)

․직영 제설장비(6대) : 제설기간 만료 후에도 일주일 정도 기상상황을 예의 주시한 후 탈착작업(3월 23일 이후)

▶ 소내 폐아스콘 운반으로 15톤 덤프 1대는 17일(화요일) 탈착

- 장비 가동상태 점검 : 2020. 3.30. ~ 4. 3.

- 보양 및 보관작업 : 2020. 4. 6. ~ 4.10.

❍ 작업대상

계	덤프트럭	다목적트럭	염화칼슘 살포기	제설삽날
43	5	2	15	21

❍ 작업반 편성

- 탈착작업 및 세척 : *************

- 장비 가동상태 점검 : *************

- 보양 및 보관작업 : ***************

❍ 작업방법

- 세척․탈착 및 보양작업은 사무실 장비담당과 조종원으로 작업 실시

․탈착 작업 시 사전 안전교육 실시

- 장비 가동상태 점검은 제설장비 살포기 및 삽날 상태 파악

- 살포기 엔진오일, 냉각수, 밧데리 등 점검

- 구동축 등 구리스 도포 및 각종 라이트 점검

- 경미한 녹 제거 및 방청 도색작업은 자체로 실시

3		주요 작업내용

❍ 탈착작업 및 세척

- 덤프트럭에서 염화칼슘 살포기 탈착작업 실시

- 살포기 내․외부 및 하부에 대한 물 세척작업 실시

- 제설삽날 물 세척작업 실시

❍ 장비 가동상태 점검

- 살포기 구동상태 파악(덮개, 콘베어, 슈트, 회전판 등)

- 유압실린더 및 유압호수 누유 파악

- 엔진 작동 및 엔진오일, 냉각수, 밧데리 점검

- 경광등 및 작업등 점검

- 부식상태 파악

❍ 보양 및 보관작업

- 체인 구동장치 및 밸브류 구리스 도포

- 회전부 및 베어링 구리스 주입 등 부식방지 유지관리 작업 실시

- 살포기 유류탱크 유류제거 등

	< 제설장비 보관장소 >
◈ 선암 제설전진기지내 사무동 및 장비동 ▸ 염화칼슘살포기 15대(사무동 주차장), 삽날 21대(장비동) ※ 제설차량은 선암 제설전진기지로 이전하기 전까지 현 사업소 주차장에 보관 ∙15톤 덤프트럭 2대, 8톤 덤프트럭 3대, 다목적트럭 2대

4		작업결과 조치

❍ 경미한 사항은 자체 즉시 정비 수리하고,

❍ 즉시 수리가 불가하고 예산이 수반되는 사항은 정비계획을 수립하여 정비 조치.

5		행 정 사 항

❍ 제설장비 보양작업 시 소모품 구입

- 소요예산 : 금700,000원

- 예산과목 : 도로관리, 도로 및 시설물관리, 건설장비 대폐차 및 유지관리, 공공운영비

❍ 제설장비 보관장소(선암 제설전진기지)에 대한 정기적인 순찰 및 점검실시.

붙임 : 선암 제설전진기지 장비 보관 계획 1부.   끝.