실정보고 검토서

공사명

강남순환도시고속도로 4공구 건설공사

공사개요

· 위    치: 금천구 독산동~소하동 JCT

· 규    모: 폭4~8차로, 연장 2.48㎞

· 공사기간: ’01.12.29.~’20.5.31.

· 도 급 비: 202,020백만 원

· 시공사: 롯데건설(주)

· 감리단: ㈜서영엔지니어링

· 설계사: ㈜서영엔지니어링

실정보고 건명

금하지하차도 개통에 따른 도로 유지관리비 반영

실정보고

사유

도시계획도로 구간 쓰레기 및 도로변 잡목 제거, 파손된 시선유도봉 재정비에 따른 도로유지관리비 반영

건설사업관리단

검토의견

도로시계획도로 구간의 노상에 투척된 쓰레기 청소처리, 잡목제거 등을 시행하기 위한 도로유지관리비는 적정함.

공기에 미치는 영향

(  -  )  개월

변경(안)

구분	당초	변경	비고(증감)
규모	-	낙하물 및 잡목 제거 1식 시선유도봉 35EA 폐기물처리 231m3	증) 1식 증) 35EA 증) 231m3
금액	-	22,800,000	22,800,000

예산조치 계획

당초 도급비 범위내 시행가능 (    )

당초 사업비 범위내 시행가능 ( ○ )

별도(추가) 예산 확보 필요   (    )

추가 행정절차 이행 필요여부

- “해당 없음”

발주처

검토의견

도시계획도로 구간(소하JCT~금하지하차도)의 도로 유지관리비용 반영에 대한 책임건설사업관리기술자의 실정보고는 적정함

비 고

결재

담당

김구

과장

장수철

부장

03/13

김용제