문서번호	급수운영과-5169
결재일자	2020.3.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장		북부수도사업소장
최규찬	代안윤자	유승효		03/13 박병권
협 조
	시설관리과장		이승완
	주무관		이태화

2020년 소블록 배수관 물세척 추진계획

2020. 3.

북부수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2020년 소블록 물세척 추진계획

고도정수처리된 깨끗한 아리수를 수도꼭지까지 공급하기 위한 관내부 세척을 위해 『배수관 소블록 세척(Flushing) 사업』을 추진하고자 함.

Ⅰ				관 련 근 거
		c

□ 본부 배수과-2239(2020.03.09.)호와 관련임

○ 2020년 소블록 내 배수관 물세척 추진계획

전

후

슬라임

<물흐름방향 및 유속 변동에 따른   수도관 내부 상태>

수도관내부 상태 -

Ⅱ				추 진 배 경
		c

□ 고도정수처리된 깨끗한 아리수를 가정까지 공급

하기 위해 수도관 내부에 부착된 물 때(슬라임 등)

제거를 위한 물세척 시행

※ 슬라임(slime) : 수도관 내부에 자연발생하여 벽면에 부착되는 각종 점액상

물질로서 물 흐름 방향 및 유속 변동시 탁수 발생 가능

□ 물흐름 방향 및 유속 변동 시 수도관 내부 탁수발생 우려

Ⅲ				물세척 사업개요
		c

□ 사업대상 : 소블록 218개(강북구 75개, 노원구 90개, 도봉구 53개)

□ 세척 구간 확대 시행

	⟹
소블록 내 일부구간 선단위 세척 시행		소블록 전체 면단위 세척 시행

○ 5년간(‘15~‘19) 선단위 물세척 시행으로 전체 소블럭(218개소) 세척을 완료하였으며, 향후 5년간(’20~‘24) 면단위 소블럭 물세척 시행으로 사업 확대

□ 기간제 노동자 증원을 통한 팀제 운영

○ 급수운영과(1팀-4명),시설관리과(1팀-4명) 면단위 소블럭 물세척 시행

※ 2팀 운영에 따른 차량 임대비 6,400천원 예산 반영(800천원/월)

□ 연차별 추진계획

구 분	선단위 물세척	면단위 물세척					비 고
연 도	2015~2019	2020	2021	2022	2023	2024
소블록(개소) < 추진실적 >	218	44	44 (예정)	44 (예정)	44 (예정)	42 (예정)
사업비(백만원)	626	282	282 (예정)	282 (예정)	282 (예정)	280 (예정)
기간제근로자(명)	23	8	8 (예정)	8 (예정)	8 (예정)	8 (예정)

○ 기 추진 : 218개 소블록(2015년 ~ 2019년）

※ 관내 218개 소블록 전체 배수관 선단위 물세척 완료

○ 시행방법 : 5년주기 면단위 물세척 시행

※　’20년 ~ ’24년 면단위 세척 시행(연간 44개 소블럭 예정)

Ⅳ				‘15~‘19년도 추진실적
		c

□ 추진방법 : 기간제근로자 4~5명 채용하여 추진

□ 추진실적 : 소블록 218개, 관말정체수 관리 20개소

구 분		계	노원구	도봉구	강북구	비 고
소블록	블록수	218	90	53	75
	연장(m)	95,566	39.723	24,200	31,643
취약 관로	개 소	20	5	4	11
	연장(m)	3,562	787	1,016	1,759

□ 세척 전, 후 수질검사결과(탁도 ↓0.16 NTU 감소, 잔류염소 ↑0.06 ㎎/L 향상)

※ 탁도(0.5NTU이하) : 0.36  →  0.20NTU

잔류염소(0.1㎎/L이상) : 0.24  →  0.30㎎/L

Ⅴ				2020년 추진계획
		c

소블록 물세척

□ 사업기간 : 2020. 4월 ~ 11월(8개월)

□ 사업목표 : 소블록 44개소(공기주입식 30개소 포함)

○ 위치도

(단위 : 개소, 명, 백만원)

구 분	계	소계	노 원	도 봉	강 북	비 고
소블록	44	-	15	11	18
투입인력	8	-	4		4
소요예산	282	192	96		96	인건비
		9	3		6	사무관리비
		20	10		10	보험료
		60	30		30	수선유지비

□ 추진방법

○ 대상 : 소블록 내 80 ~ 350mm 상수도관 물세척

○ 선정기준

- 배수지 인근, 대형배수관로 주변 지역

- 순환관망 및 퇴수시설 정비지역

- 다량급수처/일반지역 등 지역

○ 세척방법

- 퇴수시설을 이용하여 소블록단위 유수방향 세척

- 중블록내 인접 소블록 연계추진

○ 세척순서

- 소블록 경계 주 공급관로 우선시행

- 소블록내 주 배관, 배수지관 등

․유수방향에 따라 대구경 → 소구경

○ 기간제근로자(8명) 채용 추진

- 급수운영과 : 1팀(4명) - 노원구,도봉구

- 시설관리과 : 1팀(4명) - 강북구

□ 세척추진단계

【 1단계 】사전 시설물 점검 : 인접 소블록 경계 및 주요 밸브 등 시설점검

○ 제수밸브 개폐여부, 퇴수밸브 적정 설치 여부 등 확인(양식#1)

- 세척 소블록 및 인접 소블록 급수공급계통 확인

- 주요 공급관로 상수도시설물 점검(소블록 주 공급관로)

- 다량급수처 현황파악 및 인입밸브 점검

․비상연락망 및 급수현황 확인

- 관세척 구간 우선순위 선정

․소블록 경계 주 공급관로 → 소블록내 주 배관 → 배수지관

- 퇴수시설 추가 설치 필요 여부 조사

- 공기주입 세척 적정 구간 선정

․ 공기주입구 설치를 위한 부대공사(다용도밸브 및 새들분수전 설치 등) 시행

【 2단계 】소블록 밸브 조절

○ 소블록 물세척 시행을 위한 사전 밸브 조절

- 급수운영에 지장이 없는 범위에서 블록내 밸브 열음

․ 필요시 노후 밸브 교체 및 밸브 철거 후 순환관망 형성

- 다량급수처 인입밸브 개도 조정(유량조절)

- 기간제 근무자 주요 밸브 조절 불가

․지역담당 및 수계조절 직원 협조

- 물세척 소블록 주 공급관로 밸브 조절 시 인접 소블록 급수상태 확인

- 세척 구간별 단수 홍보 실시(1~2일전)

- 소블록 세척 전․후 시설물 현황 작성(양식#1)

․ 밸브조절에 관한 조절사유,속성자료 입력 및 관리(정비,특이사항 기록 관리)

【 3단계 】소블록 관세척 시행

○ 배수관 세척 계획수립 및 진행 (양식#2)

- (예시)공릉35소블록

《 공릉35 소블록 세척 세부 시행계획》

순서	작업 내용	비고
①	소블록 경계 주 공급관로(250mm) 세척
②	소블록 경계 주 공급관로(300mm) 세척
③	소블록 내 주 공급관로(200mm) 세척
④	소블록 내 주 공급관로(200mm) 세척
⑤	소블록 내 배수지관(80~150mm) 세척
⑥	소블록 내 퇴수밸브, 다용도, 소화전 등을 활용 구간별 세척
⑦	공기세척 구간 세척

- 소블록 경계 주 공급관로 → 소블록내 주 공급관로 →소블록내 배수지관 순으로 세척

- 유수방향에 따라 세척방향 결정

- 세척구간 다량급수처 및 수요가 급수관 밸브 차단(수질사고 예방)

☞ 세척후 통수시 다량급수처 반드시 수질확인

- 안정적인 수질확보를 위해 충분한 퇴수실시

- 소블록 세척 전․후 수질검사 시행(양식#1)- 퇴수시설 수질검사

- 실적보고 작성 및 세척․중․후 수질자료분석 시행(양식#3)

관말정체수 관리

□ 목    표 : 12개 구간

구 분		계	노 원	도 봉	강 북	비 고
취약 구간	개 소	12	3	4	5
	연 장	2,264	613	1,016	635

☞ '12~19년도 취약구간에 신발생 및 제외구간을 고려하여 목표 설정

□ 추진방법

○ 기간제근로자 활용하여 관말 정체구간에 대한 물세척 병행 시행

○ 선정된 취약구간에 대하여 세척주기별 반복세척(20일~50일 등 1회주기)

☞ 새로운 취약구간 발생시 5단계(20, 30, 40, 50일 등) 세분화된 시범세척을 통해 세척주기 산정하여 세척추진

○ 대상 선정기준 : 수지상관 형태로 관말 정체지역, 잔류염소 미달지역

○ 세척방법 : 퇴수시설을 이용하여 관말 정체구간 끝단에서 단방향 세척

관말 취약구간

물세척

공기주입 물세척 시행

□ 개 요

○ 주요 공법내용

- 공기주입+물세척 : 고압의 공기를 관 내부에 주입, 수충격을 이용한 세척

<공기주입 장치를 통한 관 세척 개념도>

○ 추진목표 : ’20년 물세척 대상 44개 소블록 중 30개 소블록

○ 사업비 : 3,000만원

- 공기주입구 설치를 위한 부대공사(다용도밸브 및 새들분수전 설치 등)

⦁ 개소당 1,000천원 × 30개소 ≒ 30,000천원

Ⅵ				기간제근로자 운영계획
		c

□ 2020년 기간제근로자 채용

명 칭	채용인원	주 요 업 무
배수관 소블록 물세척 기간제근로자	8명	배수관 소블록 물세척 업무수행 · 세척시행 전 세척구간내 시민가정 단수홍보 · 세척기간 중 교통통제 및 세척 후 주변정리 · 세척전·후 수질검사 시행, 결과비교 누수 등 사고 시 수계전환(밸브조절)업무보조

※ ’15년 5명, ’16년 4명, ’17년 5명, ’18년 5, ’19년 4명의 기간제 근로자를 채용

□ 기간제근로자 운영 계획(4월~11월)

○ 월별 6개 소블록 세척 (3개 소블록/팀(4명))

구분		1일차	2일차	3일차	4일차	5일차	비고
첫째주	제1소블럭	소블록 주요 밸브 조사 및 단수홍보	시설물 현황 작성 주요 밸브 조절	소블록 물세척 진행
둘째주	제2소블럭	소블록 주요 밸브 조사 및 단수홍보	시설물 현황 작성 주요 밸브 조절	소블록 물세척 진행
셋째주	제3소블럭	소블록 주요 밸브 조사 및 단수홍보	시설물 현황 작성 주요 밸브 조절	소블록 물세척 진행
넷째주	제1~3소블럭 및 관말정채수 관리	소블록 물세척 진행		관말정체수 수질관리

○ 교육 및 현장 상시 연락체계 구축

- 사업시작전 물세척에 대한 개념과 추진방향 안내

- 작업자 안전관리 준수 및 안전사고 예방 교육

- 팀별 숙련자를 조장으로 선정하여 현장 진행사항 및 문제 발생시 즉시 대응하기 위해 상시연락쳬계 구축

○ 모니터링 및 소통을 통한 효율적인 방안 도출

- 소블록 물세척 전․중․후 모니터링 및 현장 근로자와 소통을 통해 효과분석과 효율적인 방안 모색

Ⅶ				행정사항 및 향후계획
		c

□ 행정사항

○ 행정지원과

- 사업소 자체 수질검사장비(탁도,잔류염소계) 활용(수질검사 교육)

○ 급수운영과, 시설관리과(지역담당)

- 소블록 면단위 물세척 관련 담당자(팀장,지역담당,실장 등) 교육실시

- 소블록별 세척 세부일정 별도 계획 수립

․ ‘20년 진행사업 및 소블록별 세척 난이도 고려

- ’19년도 소블록 물세척 실시 지역의 비내식성밸브 우선 교체

- 관말정체수 구간에 새로운 취약구간 발생 및 정비공사 등으로 기존구간 제외 시 즉각 반영

- 공기세척 소블록 구간 공기주입구 설치 등 부대공사 집행 철저

- 매월 5일까지 소블록 배수관 물세척 실시 결과보고(지역담당)를 총괄담당에 제출

- GIS시스템 상단배너 「행정지원」 ⇒ 「물세척관리시스템」에 자료 입력 철저

붙임  1. 소블록 물세척 20년 계획 및 관말정체수 관리 대상.

2, 소블록 물세척 시설물 관리카드 및 수질검사위치(양식#1) 1부.

3, 소블록 세척계획(양식#2) 1부.

4. 실적보고(양식) 1부.  끝.