문서번호	토목부-5408
결재일자	2020.3.16.
공개여부	부분공개(5 7)
방침번호

						시 민
주무관		터널건설과장		토목부장
이현국		최진우		03/16 김용제
협 조

시추조사 완료에 따른 수량 정산 검토보고 -올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사-

2020. 3.

도시기반시설본부

( 토 목 부 )

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

- 올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사 -

시추조사 완료에 따른 수량 정산 검토보고

『올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사』의 시추조사(지반조사) 완료 후 설계서와 실제 지반상태 상이에 따른 실 시공 수량 정산에 대한 검토보고임

Ⅰ		관 련 근 거

○ 공사계약일반조건 제19조(설계변경 등)

- 지질, 용수 등 공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우

○ 수량산출서

- 시추조사의 토질별 심도는 추후 심도별 실비정산토록 함

○ 가시설 공법 변경 검토보고【토목부-24580(‘16. 11. 29.)호】

- 추가 지반조사 시행

○ 시추조사 정산 수량 설계반영 실정보고【올대감 20-055(‘20. 3. 12.)호】

Ⅱ		사 업 개 요

○ 사 업 명 : 올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사

○ 공사위치 : 송파구 풍납동 일대

○ 사업규모

- 램프신설 : L=1,383m (교량 446m 포함)

- 램프이설 : L=1,309m (교량 139m 포함)

- 올림픽대로 이설 : 하남방향(L=1.21km), 김포방향(L=1.16km)

○ 사업기간 : 전체‘16. 4. 1. ~ ‘21. 12. 31. (5차 : ‘20. 1. 17. ~ ‘20. 12. 31.)

○ 총사업비 : 전체 50,791백만 원 (‘20년 : 11,200백만 원)

○ 감 리 사 : ㈜이산외 2개사

○ 시 공 사 : ㈜덕일외 2개사

○ 공 정 율 : 66%

Ⅲ		검 토 내 용

○ 상하수도 가시설 공사중 파일항타 미근입구간 추가지반조사 사항 반영

- 토목부-24580(‘16. 11. 29.)호

○ 아산병원 앞 방음벽 설치 관련 방음벽 기초형식 변경에 따른 지반조사 미시행 사항 반영

○ 설계와 상이한 근입 심도별 실제 지반상태 반영

「시추조사 위치도」

「위치별 시추조사 변경현황」

구 분	단위	당 초	변 경	증·감	비고
계	공	26	31	증 5
상수도 가시설 구간	공	-	8	증 8
J1교	공	7	7
J2교	공	12	12
E교	공	4	4
방음벽 구간	공	3	-	감 3

***********************

***	**	***			**********
		**	**	***	**	**	***
******************
*******	**	**	**	*	*****	*****	*****
*******	*	***	***	***	******	******	******
***	*	***	***	***	******	******	******
****	*	***	***	***	******	******	******
****	*	***	***	**	******	******	*****
****	*	***	**	****	******	*****	*******
****	*	*	*	**	***	*	****
***********	*	**	**	*	***	***	**
**************	*	**	**	*	*****	*****	***
************	*	**	**	*	*****	*****	***
******************	*	**	**	*	***	***	***
**********	*	**	**	*	*****	*****	***
*****					*******	*******	******
*****					******	*******	******
*****					*******	*******	******

*****************

Ⅳ		조 치 계 획

○ 책임건설사업관리기술자의 검토의견과 같이 시추조사(지반조사) 공종 완료에 따른 실시공 수량 정산은 적정하다 판단되므로, 승인 후 설계변경에 반영하고자 함.

붙임  책임건설사업관리기술자 검토보고서 1부.  끝.