시  민

문서번호	급수운영과-4104
보존기간	년
결재일자	2020.3.16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

주무관	수질팀장	급수운영과장	남부수도사업소장
이현우	여종순	이용구	03/16 박영준
협 조
	시설관리과장		고신석
	급수운영팀장		서규석
	행정관리팀장		신민철
	주무관		이순필

2020년 배수관 물세척사업 추진 계획

2020. 3. 13.

남부수도사업소

(급수운영과)

2020년 배수관 물세척사업 추진계획

고도정수처리된 깨끗한 아리수를 수도꼭지까지 공급하기 위한 관내부

세척을 위해 물세척 및 공기주입장치를 활용한 『배수관 소블록 세척

(Flushing) 사업』을 추진하고자 함.

※ 관련근거: 2020년 소블록 내 배수관 물세척 추진계획(배수과-2663호)

전

후

슬라임

< 물흐름방향 및 유속 변동에

따른 수도관내부 상태 >

Ⅰ		추 진 배 경

□ 고도정수처리된 깨끗한 아리수를 가정까지 공급

하기 위해 수도관 내부에 부착된 물 때(슬라임 등)

제거를 위한 세척 시행

※ 물흐름 방향 및 유속 변동 시 수도관 내부 탁수 발생 우려

□ 기존 물세척 및 공기주입장치를 활용한 세척도 병행하여 시행

Ⅱ		세척사업 개요

□ 사업대상 : 소블록 303개 (전체 소블록)

□ 연차별 추진계획

구 분	계	2020	2021	2022	2023	2024	비 고
소블록(개소) < 추진실적 >	303	61	60	61	60	61
사업비(백만원)	1,413	283	282	283	282	283
기간제노동자(명)	40	8	8	8	8	8

○ 시행방법 : 5년 주기 시행

□ ’19년 소블록 세척 추진실적

○ 추진실적 : 소블록(일반) 65개소, 공기주입세척 15개소, 취약관로 23개소

○ 세척 전, 후 수질검사결과

구 분	기 준	세척 전	세척 후	효 과
탁 도	0.5NTU이하	0.47NTU	0.23NTU	평균 0.24NTU 감소
잔류염소	0.1㎎/L이상	0.17㎎/L	0.28㎎/L	평균 0.11㎎/L 증가

○ 추진방법 : 기간제노동자를 채용하여 추진

※ 2009~2011 사업소 직원이 추진하였고 2012부터 기간제 노동자를

활용하여 취약관로 중심으로 물세척 시행, 2015부터 전체소블록 추진.

Ⅲ		추 진 방 법

□ 『서울시 배급수관 최적 플러싱 수행 매뉴얼』에 의거 5단계 절차로 시행

① 계획수립	→	② 세척구간 설정 및 단수홍보	→	③ 구간별 세척 및 수질검사	→	④ 자료수집 및 결과보고	→	⑤ 실적수합 및 평가

□ 세척 전ㆍ후 수질검사를 통해 효과분석

○ 측정항목 : 퇴수시간, 퇴수량, 수질검사

○ 세척 전ㆍ후 수질검사 항목 : 탁도, 잔류염소 등

○ 세척대상 관로 인근 수도꼭지의 세척 전․후 수질검사 및 결과분석

Ⅳ		’20년 추진계획

소블록 물세척(기간제노동자 활용)

□ 사업기간 : 2020. 4. ~ 11.(8개월)

□ 사업목표 : 소블록 61개소 (사업비 283백만원)

○ 구   별                                                   (단위 : 개소)

구 분	계	관악구	금천구	동작구	영등포구
소블록	61	18	11	21	11

○ 소블록별

구 분	소계	소 블 록 현 황
블록수	61
관악구	18	낙성대01-01, 낙성대01-09, 낙성대01-12, 낙성대01-16, 낙성대01-18, 낙성대01-22, 낙성대01-23, 낙성대01-24, 낙성대01-25, 낙성대01-26, 낙성대01-29, 낙성대02-12, 낙성대12, 낙성대15, 독산01-02, 독산01-04, 독산05, 독산12
금천구	11	금천01-01, 금천01-03, 금천01-04, 금천01-08, 금천12, 금천20, 금천22, 금천24, 금천27, 금천30, 금천34
동작구	21	방배01, 방배01-03, 방배01-04, 방배01-05, 방배02, 방배03, 방배09, 상도01-03, 상도05, 상도06 상도10, 상도15, 방배07, 상도01-01, 상도01-12, 상도01-16, 상도01-20, 상도13, 상도20, 상도07, 상도08
영등포구	11	대방03, 대방14, 대방53, 대방54, 대방65, 대방66, 대방67, 대방13, 대방22, 대방52, 대방59

○ 월   별

월 별	계	4	5	6	7	8	9	10	11
블록수	61	8	8	6	6	8	8	8	9

□ 추진방법

○ 기간제노동자 총 8명(반장요원 1명 포함) 선발

- 기간제노동자 중 세척작업과 기간제노동자를 통솔할 반장요원 2명(급수운영과, 시설관리과)을

선정하여 운영

	관세척이 필요한 수질민원 발생지역, 비내식성 밸브 산재지역
	정수장 및 배수지 급수지역 경계 소블록

○ 세척대상 소블록 및 구간 선정

- 선정기준

※ 송배수관 및 배급수관 정비사업 예정구간 제외

○ 세척 방법 : 퇴수시설을 이용하여 소블록단위 구간별 양방향 세척

☞  퇴수밸브, 소화전 활용

○ 구별 세척일정 : 4~11월(관악구, 금천구), 4~11월(동작구, 영등포구)

- 당일 세척(물세척, 취약관로)실시 결과 확인 후 복명서 작성

※ 퇴수밸브, 소화전 활용

물세척 개념도

물세척

취약관로

□ 사업목표 : 23개 구간

(단위 : 개소)

구 분		계	관악구	금천구	동작구	영등포구
취약구간	개 소	23	8	5	5	5
	연장(m)	2,149	740	495	555	359

□ 추진방법

○ 기간제노동자를 활용하여 취약구간(관말 정체구간)에 대한 물세척 병행 시행

○ 선정된 취약구간에 대하여 세척주기별 반복세척(20일~50일 1회)

- 세척주기 산정 : 50일(’12~19년도 세척주기를 반영하여 산정)

☞ 새로운 취약구간 발생시 5단계(20, 30, 40, 50일 등) 세분화된 시범세척을

통해 세척주기 산정

○ 선정기준 : 수지상관 형태로 관말 정체지역, 잔류염소 미달지역

○ 세척방법 : 퇴수시설을 이용하여 관말 정체구간 끝단에서 단방향 세척

관말 취약구간

관말 정체구간 등 취약구간 물세척

공기주입장치 활용 세척 시행

□ 공법개요

○『압축공기 + 물』로 관 내부를 세척하는 공기주입 세척 사업

- 추진목표 : 30개 배수관(30구간)

○ 주요 공법내용

- 공기주입+물세척 : 고압의 공기를 관 내부에 주입, 수충격을 이용한 세척

공기방울

압축공기

수돗물

제수밸브(잠금)

소화전(퇴수)

제수밸브 조절

(세척수 공급)

H

공기주입구

(새들설치)

공기주입장치

<공기주입 장치를 통한 관 세척 개념도>

○ 사업비: 30,000천원

- 공기 주입구 설치를 위한 부대공사 필요(다용도밸브 및 새들분수전설치 등)

- 총 30개 배수관: 개소당 1,000천원×30개소(각 지역담당 선정)= 30,000천원

○ 대상 소블록 선정 : 지역 담당별 현장 조사 후 상반기 중 선정 예정

- 대상구간 선정 시 검토사항

․공급관로 양단에 제수밸브, 퇴수밸브 등 시설물이 설치된 곳

․세척구간에 분기된 수요가가 없거나 적은 곳

․공기주입구(새들분수전 등) 설치가 용이한 곳(공기밸브실 등 필요)

․세척중 발생되는 세척수의 처리가 용이한 곳(하수도 변실 인근 등)

- 공기주입 세척시 인근 유사한 소블록내 물세척 구간과 세척효과 비교 검토

Ⅴ		기간제노동자 채용방안

□ 기간제노동자 채용 개요

○ 명 칭: 배수관 소블록 물세척 기간제노동자

○ 채용인원 : 8명

○ 사업기간 : 2020. 4. 1. ~ 11. 30.(예산한도내 또는 업무완료시까지 한시적 채용)

○ 주요업무 : 배수관 소블록 물세척 업무수행

- 세척시행전 급수구역내 시민가정 단수 홍보

- 세척기간중 교통통제 및 세척후 주변 정리

- 세척전․후 수질검사 시행, 결과 비교 등

○ 근무조건 : 월요일~금요일까지 일 8시간 (09:00 ~ 18:00)

□ 채용방법

○ 적용기준 : 서울특별시 기간제노동자 관리규정[2019. 12.5 개정] 및 기간제노동자          채용 및 관리지침(보완)[일자리정책과-2093호, 2014. 2.17〕

- 공개채용을 원칙으로 자격조건을 구체적으로 정한 후 추첨방식을 통해 엄정 적용

- 채용계획 후 서울시(seoul.go.kr), 일자리플러스센터(job.seoul.go.kr),

부서 홈페이지 등 정보통신망을 활용 10 일 이상 공고(규정 제8조 제2항)

- 첨부된 채용심사기준표를 기준으로 모집인원의 2배수를 우선 선발 후 반드시 대상자 입회 하에 공정하게 공개추첨(미입회자는 자동 탈락)

․ 추첨일(사업소 공통) : ’20. 3. 25(수) 10:00

․ 누수탐지 기간제노동자 선정 추첨과 동일 날짜, 동일 시간에 수도사업소에서 공개 추첨

- 채용인원 미달 시 심사기준표 차순위 순으로 채용

□ 기간제노동자 보수 및 수당 지급 기준

○ 보수 지급내용 : 최대 280만원/월,인

- 월급: 102,112원/일×25.4일(한달 중 실제 일한 일수) = 약 260만원

․ 노임적용: 공간정보산업협회발표 측부 임금(’20.1월 기준 102,112원/일)

- 수당: 출장비 츨장일수 × 5,000원

※ 가족수당은 부양가족에 따라 최대 5만원 지급

※ 동일업무 수행중인 공무직 임금 수준으로 조정하기 위해 측부 임금 적용

※ 기타 사항(월차수당, 휴무수당, 초과근무 등)은 기간제노동자 관리지침 참조

- 1개월 개근시 유급 월차 휴가실시

Ⅵ		행정사항 및 향후계획

□ 행정사항

○ 행정지원과

- 수질검사장비(탁도, 잔류염소계) 대여 및 수질검사 교육: 수질팀

- 기간제노동자 출퇴근 확인을 위한 지문인식기 등록: 행정관리팀

○ 급수운영과, 시설관리과

- 해당 소블록에 대한 물세척 위치 확인 및 도면 제출

- 당일 작업(물세척, 취약관로세척) 실시 결과 확인 후 복명(과별 총괄담당 협조)

○ 본부 실적보고(배수과)

- 매월 10일까지 소블록 및 취약관로 물세척 실적 보고

□ 향후계획

○ 기간제노동자 채용계획 수립 및 채용	’20. 2. ~ 3.

- 기간제 노동자 채용 공고: ‘20. 2.24.(월) ~ 3. 6.(금)

- 채용 참여신청서 접수: ‘20. 3. 11.(수) ~ 3. 13.(금)

- 1차 합격자 발표: ‘20. 3.20.(금)

- 1차 채용심사에서 선발된 인원 2차 공개추첨(전 사업소 공통) : ’20.3.25 (수) 10:00

○ 배수관 물세척 사업 추진	’20. 4. ~ 11.

○ 사업시행 후 효과분석	’20. 12.

붙임  1. 연차별 소블록 물세척 추진계획 1부.

2. 소블록 내 배수관 물세척 추진계획 1부.  끝.