문서번호	정수시설과-660
결재일자	2020.3.16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	구의아리수정수센터소장
윤기영		조귀현	03/16 이달영
협조

2019년 구의아리수정수센터 토목․건축 시설물 정비공사(장기계속공사)

설계변경(2차) 심의결과 보고

2020. 3.

구의아리수정수센터

2019년 구의아리수정수센터 토목건축시설물 정비공사(장기계속공사)

설계변경(2차) 심의결과 보고

토목․건축 시설물 정비공사(장기계속공사) 시행 중 물량의 증·감 및 신규공정에 대한 설계변경 심의를 실시하고 결과를 보고 드림.

1		사업현황

□ 공사개요

❍ 사 업 명: 2019년 구의아리수정수센터 토목·건축 시설물정비공사

❍ 사업기간: 2019. 04. 11. ∼ 2020. 03. 31.

❍ 계약금액: 금130,673,200원

❍ 계 약 자: ㈜베스트로드 대표 라윤주

❍ 공사규모

- 토공: 콘크리트포장절단(100~150mm)외 19종

- 구조물공: CONC인력비빔타설(소형구조)외 37종

- 부설공: 고강성PVC이중벽관 접합 및 부설(D=200mm)외 27종

2		설계변경 사항

□ 주요 변경내역

○ 토공[콘크리트포장절단(100~150㎜) 외 19종]

- 본관 실외기 목재가림막 합성목재 가림막으로 교체에 따른 토공물량 증·감 발생

- 제1문화재 등나무 받침 설치에 따른 토공물량 증·감 및 신공종 발생

○ 구조물공[Con’c인력비빔타설(소형구조) 외 37종]

- 정수지 지하관랑 인젝터투입실 난연판넬 칸막이 시설 설치에 따른 신공종 발생

- 정문 방호실 바닥 높이기(악세스 플로워) 공사에 따른 신공종 발생

○ 부설공[고강성 PVC 이중벽관 접합 및 부설(D=200㎜) 외 37종]

- 탈수기동 2층 바닥 방수공사에 따른 신공종 발생

- 제2정수장 여과지동 사다리 및 난간설치에 따른 신공종 발생

□ 총괄 변경내용

❍ 세부 물량 및 금액변경 사항: 붙임 내역서 참조

❍ 변경내역

구 분	당초 금액	변경 금액	증·감액
1차수 금액	**********	**********	-
2차수 금액	***********	***********	************
총부기금액[도급액]	***********	***********	************

3		심의결과

□ 설계변경의 타당성: 타당

□ 증·감 물량 및 제잡비 산정과 적용 적정성 여부: 적정

□ 각종 제반규정 준수 여부: 준수

□ 신규공정 낙찰율 적용 여부: 적용

4		조치의견

□ 상기 심의 결과를 반영하여 설계변경 시행하고자 함.

붙임: 1. 설계변경 심의 의견서 1부.

2. 설계변경내역서 1부.  끝.